109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 신안군에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
자은 둔장~할미도 갯벌탐방로 조성	5,900	-	2,900	3,000	-	2019	2018	90
선왕산 구름다리 설치	1,529	795	393	341	-	2019	2015	70
천일염종합유통 센터 건립사업	15,000	-	-	3,000	12,000	2021	2018	20
소금박람회 행사 개최사업	1,400	1,100	100	100	100	2022	2018	100
서울 김장문화재 신안천일염 홍보행사	1,000	600	200	100	100	2022	2018	0
다기능 수산물 위판장 시설사업	5,000	-	-	750	4,250	2020	2016	10
신안 고둥(패류) 전시관 건립	3,650	556	1,515	1,579	-	2019	2016	80
신안 섬 암석전시관 건립	3,320	79	1,108	2,133	-	2019	2016	70
증도면 농어촌폐기물 소각시설 설치	2,200	887	1279	-	-	2018	2015	100
도서자생식물 보전센터 건립	3,800	27	1,079	839	1,855	2021	2016	78
가고 싶은 섬 반월·박지도 가꾸기 사업	4,232	2,001	1,116	1,115	-	2019	2016	75

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2018년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별첨 가능)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

자은 둔장~할미도 갯벌탐방로조성

담당자

문화관광과 유용현(☎240-8356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계 5대 갯벌 중 하나인 서남해안 갯벌의 생태적 우수성을 널리 알리고

체계적인 보전과 지속가능한 이용 도모

○ 도시민에게는 갯벌의 소중함을 인식하는 탐방 및 체험 학습장 제공으로

지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 12. ~ 2019. 8.

○ 위 치 : 신안군 자은면 한운리 둔장해역 일원

○ 규 모 : 갯벌생태탐방로 L=904m, 휴게시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,900	-	2,900	3,000
국 비	2,950	-	1,450	1,500
시군구비	2,950	-	1,450	1,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 공사 총괄계약 및 1차분 착공 : 2018. 1.

○ 기초파일 시공 완료 : 2018. 12.

○ 탐방로 상부 데크공사 완료 : 2019. 6.

○ 탐방로개통 완료에 따른 임시개통 : 2019. 8.

□ 향후계획

○ 갯벌체험장 조성 및 공사완료 : 2019. 10.

○ 갯벌체험 학습장 및 탐방을 위한 체험장 운영 : 2019. 10.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

선왕산 구름다리 설치

담당자

공원녹지과 장영환(☎240-8456)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리군 대표 등산로인 비금면 선왕산에 특색있는 구름다리(목교) 설치 및 등산로 정비로 안전하고 쾌적한 등산문화 환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2019(3년사업)

○ 위 치 : 비금면 죽림리~내월리 일원(그림산, 선왕산)

○ 규 모 : 구름다리(목교) 2개소, 안전난간, 벽천안내판, 야외무대, 등산로 정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,529백만원(균특 764.5, 군비 764.5)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,529	795	393	341	-
국 비	764.5	397.5	196.5	170.5	-
시 도 비
시군구비	764.5	397.5	196.5	170.5	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2015. 07. : 2016년 지역발전특별회계 생활기반계정 인센티브 신청

○ 2015. 11. : 지방재정 투융자사업 심사 완료

○ 2016. 05. : 타당성조사 및 기본계획 용역 완료

○ 2016. 12. : 실시설계 용역 및 전라남도 계약심사 완료

○ 2018. 01. : 1차분 추진 완료(2017. 02. ~ 2018. 01.)

○ 2018. 11. : 2차분 추진 완료(2018. 05. ~ 2018. 11.)

○ 2019. 07. : 3차분 추진중

□ 향후계획

○ 2019. 12. : 3차분 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 균특사업비 미교부에 따른 사업비 감액

- 사업비 감액에 따른 일부 시설물(조형물 및 암각화) 설치 제외

사업명

천일염종합유통센터 건립사업

담당자

해양자원과 이성철(☎240-8603)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천일염종합유통센터 건립으로 국제기준에 맞는 수출제품을 생산하고 안정적인 생산□관리체계를 구축하여 판로확대 및 유통구조 개선을 통해 천일염산업 경쟁력 강화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2020년(3개년)

○ 위 치 : 신안군 압해읍 송공리 매립부지

○ 규 모 : 천일염종합유통센터 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	15,000	-	-	3,000	12,000
국 비	7,500	-	-	1,500	6,000
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,500	-	-	1,500	6,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2018. 08 : 기본계획 수립 및 타당성조사 용역

○ 2018. 09 : 지방재정 투융자 심의

○ 2018. 12 : 건립부지 군관리계획 시설결정 계획수립

○ 2019. 02 : 국가공공건축물 사전계획 심의 완료

○ 2019. 04 : 군관리계획 결정 문화재 지표조사 용역 착수

○ 2019. 07 : 기본계획 및 실시설계 설계공모 공고

□ 향후계획

○ 2019. 10. : 실시설계 설계공모 작품심사 및 착수

○ 2020. 04. : 실시설계 완료

○ 2020. : 각종 인허가 취득, 토목 및 건축 공사 추진

가공설비 구매·제작

사업명

소금박람회 행사 개최사업

담당자

해양자원과 문선주(☎240-8605)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신안천일염 홍보 및 판로개척

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009 ~ 2019년(11개년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,400	1,100	100	100	100
국 비	-		-	-	-
시 도 비	-		-	-	-
시군구비	1,400	1,100	100	100	100
지 방 채	-		-	-	-
민간자본	-		-	-	-
기 타	-		-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 07. 06. : 사업비 집행

○ 2019. 08. 15. ~ 8. 18. : 2018 소금박람회 개최

○ 2019. 06. 07. : 사업비 집행

○ 2019. 08. 14. ~ 8. 17. : 2019 소금박람회 개최

□ 향후계획

○ 2019. 08. : 2019 소금박람회 결과 보고

사업명

서울 김장문화재 신안천일염 홍보 행사

담당자

해양자원과 문선주(☎240-8605)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천일염의 다양하고 정확한 정보 전달과 우수성 및 가치를 전파하여 신안천일염의 위상 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019년(4개년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,000	600	200	100	100
국 비	-		-	-	-
시 도 비	-		-	-	-
시군구비	1,000	600	200	100	100
지 방 채	-		-	-	-
민간자본	-		-	-	-
기 타	-		-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2018. 10. 31. : 사업비 집행

○ 2018. 11. 02. ~ 11. 04. : 서울 김장문화재 개최

○ 2019. 06. : 서울 김장문화재 사전 업무 협의

□ 향후계획

○ 2019. 09. : 서울 김장문화재

○ 2019. 10. : 사업비 집행

○ 2019. 11. : 서울 김장문화재 개최

사업명

다기능 수산물 위판장 시설사업

담당자

해양자원과 김태형(☎240-8607)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관내 청정해역에서 생산되는 수산물의 유통망 구축으로 안전하고

위생적인 수산물을 적기 공급하여 어업인 소득증대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2020(계속사업)

○ 위 치 : 압해읍 송공리 718-64(매립 1지구)

○ 규 모 : 다기능 수산물 위판장(연면적 4,362㎡, 1동 2층)

○ 내 용 : 수산물 위판장, 냉동‧냉장 보관시설, 활어수조, 어업인 편의시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원(균특 2,000, 군비 1,500, 수협 1,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000	-	-	750	4,250
국 비	2,000	-	-	300	1.700
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,500	-	-	225	1,275
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,500	-	-	225	1,275
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2017. 03.  : 사업자 선정 및 보조금 교부결정(1차)

○ 2018.03.20. : 보조금 교부결정(2차)

○ 2018.04.02.~09.28. : 기본 및 실시설계용역

○ 2018.09.13. : 기본 및 실시설계용역 정지(사업부지 확보지연)

□ 향후계획

○ 2019. 11. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2019. 12. : 전남도 계약심사 및 공사입찰 완료

○ 2019. 12. : 사업 착공

○ 2020. 12. : 사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

신안 고둥(패류)전시관 건립

담당자

문화관광과 서강린(☎240-8974)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천사대교 개통에 따른 관광수요에 대응하고 섬 관광 활성화와 가족단위       관광객 유치를 위한 해양자원 전시시설 확충 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017~2019

○ 위 치 : 신안군 자은면 백산리 633-58 일원

○ 규 모 : 전시관 1동 975.26㎡(295평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,650	556	1,515	1,579
국 비	1,750	400	475	875
시 도 비
시군구비	1,900	156	1,040	704
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 건축공사 완료

○ 전시연출 및 전시보조물 제작설치 추진중(30%)

□ 향후계획

○ ‘19. 09 : 전시관 조성공사 발주

○ ‘19. 11 : 전시관 개관

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사 업 비 : 당초 3,500백만원 => 변경 3,650백만원(전시물 기증 사례금 증)

○ 사업기간 : 당초 2017~2018 => 변경 2017~2019(전시물 확보 기간 증)

사업명

신안 섬 암석전시관 건립

담당자

문화관광과 서강린(☎240-8974)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한국 분재유리공원과 연계한 국내 최대 수석정원을 조성하여 관광객의        다양한 욕구에 대응할 볼거리 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017~2019

○ 위 치 : 신안군 자은면 백산리 633-54 일원

○ 규 모 : 전시관 1동 446.47㎡(135평), 정원 조경 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,320백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,320	79	1,108	2,133
국 비
시 도 비
시군구비	3,320	79	1,108	2,133
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 건축공사 추진중(90%)

○ 전시연출 및 전시보조물 제작설치 추진중(30%)

□ 향후계획

○ ‘19. 09 : 전시관 조성공사 발주

○ ‘19. 11 : 전시관 개관

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사 업 비 : 당초 3,800백만원 => 변경 3,320백만원(조경공사비 감)

○ 사업기간 : 당초 2017~2018 => 변경 2017~2019(전시물 확보 기간 증)

사업명

증도면 농어촌폐기물 소각시설 설치

담당자

세계유산과 송신종

(☎240-8449)

□ 사업목적 및 필요성

○ 증도면에서 발생되는 생활폐기물을 효율적·위생적으로 처리할 수 있는        합리적인 처리계획을 수립, 환경오염방지 및 주민 보건위행 향상 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2018년

○ 위 치 : 신안군 증도면 증동리 848번지 일원

○ 규 모 : 소각시설 설치 A=360㎡, 소각로 300kg/hr x 1기

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2166	887	1279
국 비	1377	870	507
시 도 비
시군구비	789	17	772
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 05. : 기본계획보고서 완료

○ 2015. 09. : 소각로 구매제작설치 계약 완료

○ 2016. 03. : 실시설계완료

○ 2016. 04. : 도 계약심사 완료

○ 2017. 01. : 시설사업착공

○ 2018. 07. : 시설공사 완료(건축, 전기, 소방, 통신)

○ 2018. 08. : 소각로 사용개시 수리, 건축물 사용 승인 협의 요청

○ 2018. 10. : 전기시설 보강공사

○ 2018. 11. : 환기시설 공사

○ 2019. 02. : 정산서 제출

○ 2019. 03. : 정산 보완자료 제출

□ 향후계획

○ 소각시설 효율적, 안정적 운영으로 깨끗한 환경 조성 도모

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 :  ~ 2018.8. 납품기한 변경

- 발주처 관련기관 협의 및 심의 지연으로 인한 납품기한 변경

사업명

도서자생식물 보전센터 조성사업

담당자

세계유산과 오승석(☎240-8654)

□ 사업목적 및 필요성

○「에코 푸른 숲 전남」만들기의 일환으로 신안에서만 볼 수 있는 도서자생식물을 보전       하고 활용하여 환경부 관리 멸종위기종 및 생물자원 연구․개발

○ 전시․교육을 통한 보전과 지속가능한 이용역량강화 등 육지와 차별화된 공간을 조성       하여 관광객유치로 지역경제활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2021

○ 위 치 : 신안군 자은면 백산리 633-58번지 일원

○ 규 모 : 도서자생식물 보전센터 건축(804㎡), 도서자생식물 전시물·표본설치 (800㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,800	27	1,079	839	1,855
국 비	1,900	13	585	361	941
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,900	14	494	478	914
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 78%)

○ 2016. 06. : 신안 도서자생식물보전센터 조성 기본계획 완료

○ 2017. 05. : 전남도 경관디자인 심의 완료

○ 2017. 10. : 도서자생식물보전센터 조성 실시설계용역 완료

○ 2017. 10. : BF 등 각종 인허가 행정절차 완료 및 건축공사 2차준공

○ 2019. 04. : 도서자생식물 보전센터 건립

○ 2019. 07. : 도서자생식물 보전센터 태양광 설치

□ 향후계획

○ 도서자생식물보전센터 부대토목공사 완료

○ 도서자생식물 전시물 및 표본설치 실시설계 (800㎡)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

가고싶은 섬 반월·박지도 가꾸기 사업

담당자

가고싶은섬 TF팀 윤혜덕

(☎240-8687)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬 지역의 자연 환경을 보존하고 관광기능을 도입하여 지역사회 발전과       관광 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2019년

○ 위 치 : 신안군 안좌면 반월·박지도 일원

○ 내 용 : 경관 및 건축물관리, 편의시설, 해안 및 마을정비, 산책로 등산로개설,              홍보 및 마케팅, 주민역량강화교육, 마을기업육성, 관광서비스개선 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,232백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4232	2,001	1,116	1,115	0
국 비
시 도 비	2,000	1,000	500	500	0
시군구비	2,232	1,001	616	615	0
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75 %)

○ 2015. 09. 기본계획수립 용역 완료

○ 2016. 09. 반월도 마을식당(리모델링)공사 완료

○ 2016. 11. 박지도 해안가 둘레길 정비공사 완료

○ 2017. 10. 반월도 등산로 정비공사 완료

○ 2017. 12. 지역역량강화(주민대학) 제1기 ~ 제5기 실시 완료

○ 2018. 03. 지역역량강화 사업 선진지 견학 및 주민 교육 실시 완료

○ 2018. 05. 퍼플섬 조성사업 자색 꽃 식재 및 갓길정비 진행중

○ 2018. 08. 반월도 무인카페, 반월도 마을식당 및 게스트하우스 신축 완료

○ 2018. 09. 박지도 게스트하우스 및 마을식당 건축 완료

□ 향후계획

○ 2019. 04. 퍼플섬 조성사업 자색 꽃 식재 및 갓길정비 진행

○ 2019. 05. 반월박지도 빈집정비사업 발주

○ 2019. 06. 마을경관(지붕도색) 정비 사업 발주

○ 2019. 08. 반월박지도 홍보 마케팅 실시(홈페이지 및 SNS)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 박지도 마을식당 및 게스트 하우스 공사 변경

- 덱로드, 조경석 및 돌담 쌓기 조정, 도로경계석 설치 반영 등

10-2. 지방채 발행사업

우리 신안군에서 ‘18년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2018년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황  (해당없음)

10-3. 민간투자사업

우리 신안군에서 ‘18년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2018년	2019년	2020년 이후
BTL		해	당	없	음
BTO

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2018년까지는 집행액(결산기준), 2019년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황(해당없음)