109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 신안군에서 ‘21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
스마트 혁신온실 조성사업	47	2	0	0	45	2023	2021	0
경영실습 임대농장 조성사업	35	2	8	25	0	2022	2021	100%
미세먼지 차단 숲 조성사업	3,000	-	3,000	-	-	2021	2021	100
응급의료 전용헬기 계류장 진입도로 조성사업	2,500	251	654	1,595	0	2022	2021	25%
신재생에너지 융복합 지원사업	5,358	-	-	5,358	-	2022	2021	84
비금면 농어촌폐기물 소각시설 설치사업	2,670	-	918	1752	-	2022	2021	10
압해읍 농어촌폐기물 처리시설 설치사업	2,266	-	186	939	1,141	2023	2021	10
증도 왕바위항 어촌뉴딜 300	12,856	-	736	5,142	5,142	2023	2021	15%
안좌 우목항 어촌뉴딜 300	9,935	-	568	3,974	3,974	2023	2021	20%
암태·추포도 갯벌 생태계 복원	7,000	-	500	1,950	4,550	2024	2021	15
신안 8.2GW 대규모 해상풍력 단지개발 지원사업	5,672		1,984	2,698	990	2023	2021	30
자은 면전~백산간 도로 확포장 사업	6,400		167	17	6,216	2025	2021	10
신안 화이트 섬 관광자원화 사업	5,500	-	-	400	5,100	2025	2021	7%
신안군 전국 지구력 승마대회	170	-	170	170	170	계속	2021	100
신안 기독교 체험관 건립사업	9,500	-	-	1,247	8,253	2024	2021	13
김 육상채묘 및 냉동망 시설사업	2,000	0	0	0	0	2022	2021	30%
증도 짱뚱어다리 재가설사업	5,000			1,700	3,300	2023	2021	10
신안 군립 미술관(인피니또뮤지움)건립

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2021년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘21년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

스마트 혁신온실 조성

담당자

기술보급과 김남이(☎240-4153)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스마트 혁신온실 신축을 통한 바나나 연중생산으로 기술집약형 농업

확대와 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 1월 ～ 2022년 12월(2년)

○ 위 치 : 신안군 비금면 덕산리 1129-1 외 6필지

○ 규 모 : 1ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,700	200		4,500
국 비
시 도 비
시군구비	1,700	200		1,500
지 방 채
민간자본
기 타	3,000			3,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 스마트 혁신온실 조성 기부협약 체결 : 2020.12.17.

○ 스마트 혁신온실 조성 계획 수립 : 2021. 12.

○ 기본 및 실시설계용역 추진 : 2021. 1.

○ 조성부지 변경에 따른 성토공사 : 2022. 4

□ 향후계획

○ 스마트 혁신온실 골조시설물 공사 착공(삼진스마트) : 2021. 2.

○ 스마트 혁신온실 내․외부 설비공사 추진(신안군) : 2021. 3.

○ 재배작물 묘 구입 및 식재 : 2021. 6.

□ 사업변경 내역

○ 조성부지 변경(비금면 광대리 736-9번지 외 12필지→ 비금면 덕산리 일원)

사업명

경영실습 임대농장 조성사업

담당자

기술보급과 김남이(☎240-4153)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영농 경험이 부족한 청년에게 경영실습농장을 임대하여 시설(온실) 농업        운영 경험, 기술 등 영농 창업을 위한 밑거름 마련 기회 제공, 창업 후

실패 가능성 최소화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 1월 ～ 2022년 7월(1년 7개월)

○ 위 치 : 신안군 암태면 단고리 972-2번지 외 18필지

○ 규 모 : 13,612㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,570백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,570	200	825	2,545
국 비	1,300		600	700
시 도 비	405		225	180
시군구비	1,865	200		1,665
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 온실신축 완료

□ 향후계획

○ 청년경영실습 임대농장 운영

□ 사업변경 내역

○ 없음

사업명

자은 미세먼지차단숲 조성사업

담당자

정원산림과 이순나(☎240-8452)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신안 중부권 자은 폐기물 소각장에서 발생되는 각종 유해 물질 및 미세먼지 등으로 생활권 주민들의 피해 호소 및 관련 민원이 제기되는 실정

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 01. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 신안군 자은면 백산리 산271-24번지 일원

○ 규 모 : 차단숲 조성1식(식재공 11,500주, 배수공 L=500m, 포장공 3,000m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비		-	1,500	-	-
시 도 비		-	-	-	-
시군구비		-	1,500	-	-
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ’2020. 12. : 미세먼지차단숲 사업 신청 및 승인 알림

○ ’2021. 02. ~  : 실시설계 용역 및 지방재정 투자심사 완료

○ ’2021. 02. ~  : 미세먼지차단숲 조성사업 발주 및 준공

○ ’2021. 06. ~  : 사후관리 및 보조금 정산

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

응급의료 전용헬기 계류장

진입도로 개선사업

담당자

상하수도사업소

정영진(☎240-8490)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도서 응급의료 환자의 이송을 위해 압해읍 신장리 일원에 응급의료 전용헬기       계류장이 조성되어 있으나, 도로 환경이 열악하여 신속한 차량통행이        어려워 계류장 진입도로 개선 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.03. ~ 2022.11.

○ 위 치 : 압해읍 신장리 일원

○ 규 모 : 도로 확포장 L=1.58㎞, B=11.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,500	251	654	1,595	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,000	100	260	640	-
시군구비	1,500	151	394	955	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2021.02. : 실시계획 인가

○ 2021.03. : 사업착공

□ 향후계획

○ 2022.11. : 사업준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

비금면 농어촌폐기물 소각시설 설치사업

담당자

세계유산과 노정열(☎240-8448)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 소각시설 노후화로 강화되는 배출허용기준을 준수할 수 있는 현대       화된 소각시설 설치 시급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 01. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 비금면 죽림리 41번지 일원

○ 규 모 : 소각로 195㎏/hr, 소각동 및 재활용동 381㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,670백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,670		936	1,734
국 비	1,500		610	890
시 도 비	585		163	422
시군구비	585		163	422
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 사업진도(공정률): 실시설계 용역 완료 및 공사 착공 (10%)

○ 그간 추진실적

- '21. 02. 01. : 실시설계 용역 계약체결

- '21. 02. 17. : 2021년 제1차 지방자재정 투자심 완료

- '22. 02. 23. : 공사 도 계약심사 완료

- '22. 04. 19. : 공사 착수

□ 향후계획

○ '22. 12. : 공사 준공

○ '23. 02. : 폐기물처리시설 설치검사 및 사용개시

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

- 당초 : 2,300백만원, 변경 : 2,670백만원

○ 변경사유 : 실시설계 결과에 따른 연약지반 보강, 소각로 계약금액 반영

사업명

압해읍 농어촌폐기물 처리시설 설치사업

담당자

세계유산과 노정열(☎240-8448)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1단계 매립시설의 종료시점이 임박함에 따라 증설 시급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 01. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 압해읍 신장리 51-2번지 일원

○ 규 모 : 매립면적 1,682㎡, 매립용량 7,290㎥

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,266백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,266		113	1,012	1,141
국 비	1,500		74	666	760
시 도 비	383		20	173	190
시군구비	383		19	173	191
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 사업진도(공정률): 실시설계 용역 완료 및 공사 착공 (10%)

○ 그간 추진실적

- '21. 02. 05. : 군관리계획(변경) 및 실시설계 용역 계약체결

- '22. 03. 02. : 공사 발주

- '22. 04. 26. : 공사 착수

□ 향후계획

○ '22. 11. : 공사 준공

○ '22. 12. : 폐기물처리시설 사용개시

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

- 당초 : 2,279백만원, 변경 : 2,266백만원

○ 변경사유 : 실시설계 결과에 따른 산출단가 반영, 설계비 계약금액 반영

사업명

왕바위항 어촌뉴딜300사업

담당자

섬발전진흥과 주양오(☎240-8418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화, 생활밀착형 인프라 현대화 등을 통한 어촌 주민 삶의 질 제고 및 국가 균형 발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2023(3개년)

○ 위 치 : 신안군 증도면 우전리 일원

○ 규 모 : 외곽시설, 선착장, 접안시설, 부잔교, 마을광장, 어부복합센터 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,856백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,856	-	736	5,143	5,143
국 비	8,999	-	736	3,600	3,600
시 도 비	1,157	-	-	463	463
시군구비	2,700	-	-	1,080	1,080
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2021. 05.

○ 기본계획 승인 고시 : 2021. 12.

□ 향후계획

○ 공사 발주 : 2022. 09.

○ 공사 준공 : 2023. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

우목항 어촌뉴딜300사업

담당자

섬발전진흥과 주양오(☎240-8418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화, 생활밀착형 인프라 현대화 등을 통한 어촌 주민 삶의 질 제고 및 국가 균형 발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2023(3개년)

○ 위 치 : 신안군 안좌면 구대리 일원

○ 규 모 : 외곽시설, 선착장, 물양장, 어민공동체센터, 갯벌진입로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,935백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,935	-	568	3,974	3,974
국 비	6,955	-	568	2,782	2,782
시 도 비	894	-	-	358	358
시군구비	2,086	-	-	834	834
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2021. 05.

○ 기본계획 승인 고시 : 2021. 12.

□ 향후계획

○ 공사 발주 : 2022. 06.

○ 공사 준공 : 2023. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

암태-추포 갯벌생태계 복원

담당자

세계유산과 주성영(☎240-8646)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2000년대 지역주민 교통편의 등을 위해 암태도와 추포도 사이에 설치된

콘크리트 노둣길로 인한 해수소통 차단으로 주변 갯벌 이상 퇴적 현상,

갯벌 오염 및 악취 유발, 생물다양성 감소 등 갯벌기능 저하로 갯벌 복원

사업 진행

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2024년

○ 위 치 : 신안군 암태도-추포도 간 노둣길

○ 규 모 : 면적 7,600㎡ / 노둣길(L=1,060m, B=7.2m, H=0.6m)완전 철거

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,000	0	500	1,950	4,550
국 비	4,900	0	350	1,365	3,185
시 도 비
시군구비	2,100	0	150	585	1,365
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 실시설계 진행 중, 9월 완료 예정

□ 향후계획

○ 2022년 하반기(10월) 착공 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

신안 8.2GW 대규모 해상풍력 단지개발 지원사업

담당자

신재생에너지과 소병길
(☎240-8333)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정부의 재생에너지 3020정책에 따라 해상풍력 사업 추진이 가속화되고 있으며, 그 일환으로 신안 8.2GW 해상풍력 발전사업이 추진되고 있음

○ 기간(5~6년) 소요되는 사업기간을 예정지 사전 분석(환경, 군전파, 해상교통 등)을 통해 단축시키고 체계적인 지역 맞춤형 수용성 및 개발이익 공유 모델 발굴로 발전사업의 적기 추진을 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘21. 7. ~ ’23.12.(3년간)

○ 위 치 : 전남 신안군 해역 일원

○ 규 모 : 8.2GW 대규모 해상풍력 발전단지 조성 지원
- 인허가 저촉여부조사, 주민커뮤니티 수용성 조사 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,672백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,672	-	1,984	2,698	990
국 비	2,175	-	725	725	725
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	450	-	120	205	125
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	3,047	-	1,139	1,768	140
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ‘21.11.22. 사전인허가 검토 및 단지개발 용역 추진

○ ’21.12.30. 어업피해영향조사 용역 추진

○ ‘22.04.13. 지역커뮤니티 수용성 조사 용역 추진

□ 향후계획

○ 용역 추진에 따른 중앙부처(산업부, 해수부, 국방부 등) 협의

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

자은 면전~백산간 도로 확포장 사업

담당자

안전건설과 윤호현(☎240-8472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 라마다호텔, 마리포사리조트, 뮤지엄파크등 중부권역 거점 관광지 개발에  따른 교통수요 대응

○ 도로 확포장에 따른 굴곡부 시거 개선 및 교통사고 다발구간 교통환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 11. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 자은면 면전리 379-5 ~ 백산리 산268-13 일원

○ 규 모 : 도로확장 L=4.0km, B=15.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	0	0	167	17	6,216
국 비			100
시 도 비
시군구비			67	17	6,216
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(실시설계 용역 중)

○ 2021. 07. : 투자심사 완료

○ 2021. 07. : 실시설계 및 소규모 재해, 환경 용역 착수

○ 2022. 02. : 용역 정지

□ 향후계획

○ 2022. 10. : 관련기관 협의 및 용역 정지 해제

○ 2022. 12. : 실시설계 용역 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

증도 짱뚱어다리 재가설사업

담당자

안전건설과 박철흥(☎240-8026)

□ 사업목적 및 필요성

○ 증도 짱뚱어다리 안전진단 결과 성능저하, 상태이상 등으로 지역민 및   관광객의 안전이 염려되어 재설치하여 안전확보하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2023년

○ 위 치 : 신안군 증도면 증동리 1607-2번지 지선

○ 규 모 : 해상보행교 철거 및 설치 L=501m, B=2.0m, 경관조명 설치 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000			1,700	3,300
국 비	1,700			1,700
시 도 비
시군구비	3,300				3,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ ‘20. 3. ~ 5. : 짱뚱어다리 설치공사 노선 선정 및 지반조사 용역 완료

○ ’21. 12. : 21년 하반기 정기분 특별교부세(재난분야) 17억 확보

□ 향후계획

○ ‘22. 7. : 짱뚱어다리 실시설계 진행

○ ~’23. 12. : 실시설계 완료 후 사업발주 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

10-2. 지방채 발행사업

우리 신안군에서 ‘21년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2021년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-3. 민간투자사업

우리 신안군에서 ‘21년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후
BTL		해	당	없	음
BTO

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2021년까지는 집행액(결산기준), 2022년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비