109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 신안군에서 ‘22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후
신안군 생활밀착형 국민체육센터 건립	26,400	6,000	760	6,349	14,051	2025	2022	0
신안군 반다비 국민체육센터 건립	16,200	6,300	484	5,324	4,576	2025	2022	0
북부권스포츠관광육성 (해변승마축제)	600	-	200	200	200	2024	2022	30
중부권스포츠관광육성 (사이클 투어)	450		150	150	150	2024	2022	30
해양레저스포츠관광육성 (해양레저대회)	570		190	190	190	2024	2022	30
퍼플섬스포츠관광육성 (힐링걷기)	450		150	150	150	2024	2022	30
세대어울림 복합커뮤니티센터 조성사업	7,050	200	268	1,600	2,750	2024	2022	20%
농기계 임대사업소 설치사업	1,961	0	325	1,398	238	2023	2022	85%
유용미생물배양장 확대 운영 사업	1,960	0	0	1,960	0	2023	2022	50%
바다의 문화시설 조성사업	115,000	20	0
자은 섬꽃사업부지 토지매입	324	54	46	37	187	2026	2022	25
증도 병풍보기항 어촌뉴딜300사업	10,000	-	627	3,600	4,900	2024	2022	10
하의 옥도항 어촌뉴딜300사업	6,920	-	434	2,491	3,391	2024	2022	10
흑산 홍도2구항 어촌뉴딜300사업	10,000	-	627	3,600	4,900	2024	2022	10
압해 월포지구 연안정비사업	6,496	-	201	2,127	3,940	2024	2022	20
비금 명사십리지구 연안정비사업	5,696	-	171	1,749	3,518	2024	2022	20
안좌 신촌마을 도로 개설사업	3,300	100	-	1,500	1,500	2024	2021	10
자은 구영리 공공디자인 특화거리 조성	2,000	-	25	675	1,300	2024	2022	20
신재생에너지 보급 융복합 지원사업	4,000		4,000			2022	2022	100
신재생에너지보급 융복합지원사업	4,400			4,400		2023	2022	99
농수산물 유통시설 단지 조성사업	15,200	-	3,000	4,000	8,200	2025	2022	30
염전근로자 안심숙소 지원사업	3,000	-	-	1,000	2,000	2024	2022	5
압해 농공단지 조성사업	79,590	-	5,334	8,570	65,686	2026	2023	20
자은 백길해변 관광활성화 사업	2,600	-	-	-	2,600	2024	2022	-
김 육상채묘 및 냉동망 시설사업	2,000	-	1,931	-	-	-	2022	100
쥐노래미 산란서식장 조성사업	5,000	-	1,000	1,000	3,000	2026	2022	30
지도읍 공립 치매전담형 종합요양시설 신축	4,200	-	8	312	100	2024	2022	30
안좌면 공립 치매전담형 종합요양시설 신축	4,200	-	8	312	100	2024	2022	30
신안군 북부권역 갯벌식생 복원사업	15,000	-	1,059	3,383	10,558	2025	2022	10
채소류 출하조절시설 지원사업	100	0	50	379	9,624	2024	2023	0
특용작물생산유통현대화사업	40	0	0	108	3,892	2024	2022	10
신안군 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업	262	100	100	140	22	2024	2022	30
암태 암석정원 조성사업	9,000	0	125	1,675	7,200	2025	2022	15
신재생에너지 보급 융복합 지원사업	5,323		5,323			2022	2022	100
신재생에너지보급 융복합지원사업	4,479			4,479		2023	2022	99

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2022년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별첨 가능)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

신안군 생활밀착형 국민체육센터 건립

담당자

건강증진과 맹진석(☎240-8256)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중부권 주민의 다양한 체육, 문화 수요 충족 및 아동청소년 복지 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 7. ~ 2025. 2.

○ 위 치 : 신안군 암태면 단고리 970-1 일원

○ 규 모 : 지하1층~지상3층, 연면적 4,485.52㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	26,400	6,000	760	6,349	14,051
국 비	6,000	6,000	760
시 도 비	200				200
시군구비	20,200			6,349	13,851
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 설계공모 결과 공고 (2020. 7)

○ 전라남도 건설기술심의 (2022. 11)

○ 지방재정투자심사(재심사) 조건부 승인(2022.12)

○ 공사 발주 (2023. 7)

□ 향후계획

○ 공사 착공 (2023. 8)

○ 공사 준공 (2025. 2)

□ 사업변경 내역(해당시)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

신안군 반다비 국민체육센터 건립

담당자

건강증진과 맹진석(☎240-8256)

□ 사업목적 및 필요성

○ 북부권 주민의 다양한 체육, 문화 수요 충족 및 아동청소년 복지 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2025. 2.

○ 위 치 : 신안군 지도읍 읍내리 505-12번지 일원

○ 규 모 : 지상 2층, 연면적 2,117.08㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	16,200	6,300	484	5,324	4,576
국 비	6,300	6,300	484
시 도 비
시군구비	9,900			5,324	4,576
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 공유재산심의 완료 (2020. 3)

○ 공공건축심의 완료 (2020. 4)

○ 지방재정투자심사(재심사) 조건부 승인 (2022.11)

○ 전라남도 건설기술심의 (2023. 9)

○ 조달청 원가심사 및 전라남도 계약심사 (2022.10)

□ 향후계획

○ 공사 발주 (2023.12)

○ 공사 착공 (2024. 1)

○ 공사 준공 (2025. 4)

□ 사업변경 내역(해당시)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

북부권스포츠관광육성(해변승마축제)

담당자

건강증진과 배운주(☎240-8367)

□ 사업목적 및 필요성

○ 북부권 임자 대광해변을 활용한 승마축제를 통하여, 말(馬) 산업

특성화 지역으로서 저변 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 11월 ~ 2024년 4월까지 (2년 6개월)

○ 위 치 : 임자면 광산리 산87-19 대광해수욕장 일원

○ 규 모

- 지구력 승마대회 1식 : 말 100두, 200명 참가

- 장애물경기․마장마술경기 1식 : 말 30두, 100명 참가

- 일반관람객 유치 : 5,000명 (튤립․홍매화 축제 연동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	600		200	200	200
국 비	300		100	100	100
시 도 비
시군구비	300		100	100	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2022 신안해변승마축제 개최(완료) : 2022년 11월

○ 2023 신안해변승마축제 개최(완료) : 2023년 05월

□ 향후계획

○ 신안 해변승마축제 개최(2024년 5월)(예정)

□ 사업변경 내역(해당시)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

중부권스포츠관광육성(사이클 투어)

담당자

건강증진과 배운주(☎240-8367)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관내 자전거로, 해변로, 임도 등을 활용한 사이클 이벤트를 통해, 상시적인 사이클 동호회 방문 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 11월 ~ 2024년 11월까지 (3년)

○ 위 치 : 신안군

○ 규 모 :  사이클 그란폰도 3회 개최 : 총 1,200명 참가 유치 (400명*3회)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	450		150	150	150
국 비	225		75	75	75
시 도 비
시군구비	225		75	75	75
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2022 1004섬 신안 자전거투어대회/증도면, 안좌면(완료) : 2022년 11월

○ 2023 1004섬 신안 자전거투어대회/비금면, 도초면(완료) : 2023년 5월

□ 향후계획

○ 2023 1004섬 신안 자전거투어대회/지도읍, 임자면(예정) : 2023년 9월

○ 2024 1004섬 신안 자전거투어대회/흑산면 (예정) : 2024년 5월

□ 사업변경 내역(해당시)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

해양레저스포츠관광육성(해양레저대회)

담당자

건강증진과 배운주(☎240-8367)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양레저스포츠축제를 통해, 해변과 바다를 이용한 스포츠활동의 저변을 확대하고, 해양스포츠 메카로 발돋움

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 11월 ~ 2024년 5월까지

○ 위 치 : 신안군(암태면, 자은면)

○ 규 모 : 요트경기, 서핑경기, 해변체험 이벤트(제트스키 등, 요트체험

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 570백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	570		190	190	190
국 비	285		95	95	95
시 도 비
시군구비	285		95	95	95
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2022 해양스포츠축제 개최(완료) : 2022년 11월

○ 2023 해양힐링투어 요트 체험(추진중) : 2023년 9월

□ 향후계획

○ 2024 해양힐링투어 요트 체험(예정) : 2024년 3월 ~ 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

퍼플섬스포츠관광육성(힐링걷기)

담당자

건강증진과 배운주(☎240-8367)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계관광기구(UNWTO) 최우수 관광마을로 선정된 퍼플섬을 활용하여 힐링       걷기 프로그램을 운영, 세계적 관광명소로서 저변 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 11월 ~ 2024년 10월까지

○ 위 치 : 신안군(안좌도, 기점소악도 등)

○ 규 모 : 힐링걷기 대회 연3회 개최 : 총 3,000명 참가 (1,000원*3회)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	450		150	150	150
국 비	225		75	75	75
시 도 비
시군구비	225		75	75	75
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2022 1004섬 힐링걷기대회 개최/안좌면(완료) : 2022년 11월

○ 2023 1004섬 힐링걷기대회 개최/안좌면(완료) : 2023년 05월

□ 향후계획

○ 2023 1004섬 힐링걷기대회 개최/기점·소악도(예정) : 2023년 05월

○ 2023 1004섬 힐링걷기대회 개최/기점·소악도(예정) : 2024년 06월

□ 사업변경 내역(해당시)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

세대어울림 복합커뮤니티센터 조성사업

담당자

귀촌지원과 박선조(☎240-8225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청년마을의 안정적인 운영기반 마련 및 전 세대가 함께 사용할 수 있는 커뮤니티 공간의 통합 설치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2024(3개년)

○ 위 치 : 신안군 팔금면 장촌리 294

○ 규 모 : 주섬주섬마을 조성지 일대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,818	200	268	1,600	2,750
국 비
시 도 비	2,878		268	960	1,650
시군구비	1,940	200		640	1,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 진입로 및 경관조성 부지 취득을 위한 공유재산심의회 승인에 따라 해당 토지매입

○ 창호 교체 공사, 각 실 냉난방기 설치, 외부 화장실 리모델링 공사, 스탠드 보수공사, 석면철거공사, 내부 보수공사 완료

○ 창고 신축공사, 전시관 및 카페 설계 용역, 운동장 보수공사, 내부 도장공사, 주차장 실시설계 용역 진행 중

□ 향후계획

○ 숙소 신축공사, 전시관 및 카페 신축공사, 주차장 공사, 어린이 놀이터 추진 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

농기계 임대사업소 설치사업

담당자

기술보급과 이자영(☎240-4026)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농기계 임대사업소 노후화에 따른 농업인의 불편 가중을 해소하고, 농기계 구입 부담 경감 및 소득증대에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2023. 9.

○ 위 치 : 전남 신안군 압해읍 동서리 1001번지 외 4필지

○ 규 모 : 985㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,961백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,961	0	324.7	1,398.3	238
국 비	200	0	107.5	92.5	0
시 도 비	40	0	21.5	18.5	0
시군구비	1,721	0	195.7	1,287.3	238

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 2022. 06. : 부지매입 및 성토공사 완료

○ 2022. 11. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2023. 01. : 신축공사 계약의뢰 및 착공

○ 2023. 04. : 상수·배수설비 설치

○ 2023. 05. : 파일 및 철근콘크리트, 전기·소방·통신 기반공사 완료

○ 2023. 06. : 철골 및 조적공사 완료

○ 2023. 07.(현재) : 건축용 단열재(판넬) 공급 지연에 따른 공사 중지

□ 향후계획

○ 2023. 8월 하순 : 공사 재개 및 기타 부대공사 완료

○ 2023. 9월 중순 : 공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경

(단위 : 백만원)

구 분	당초	현재	증감율	비고
계	2,700	1,961	△27.4%
국 비	200	200	-
시 도 비	40	40	-
시군구비	2,460	1,721	△30%	계획 대비 실 공사비 감소

사업명

유용미생물배양장 확대 운영 사업

담당자

기술보급과 선현자(☎240-4142)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유용미생물배양장 및 시설 확대로 원활한 미생물 공급 기반 마련, 농업 생태계 보존, 축사 환경 개선 등 농축수산분야의 전반적인 생산성 향상으로 농가 경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년

○ 위 치 : 신안군 임자면 외 2개소

○ 규 모 : 유용미생물배양장 1개소 신축(200㎡), 멸균배양기 6기 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,960백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,960	0	0	1,960	0
국 비	200	0	0	200	0
시 도 비	780	0	0	780	0
시군구비	980	0	0	980	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2022. 04. ~ 07. : 2023년 균특 예산 확보 및 투자심사 완료

○ 2023. 01. ~ 02. : 신축 부지 선정 및 기본 계획 수립

○ 2023. 03. ~ 04. : 신축 설계 완료

○ 2023. 06. : 신축 및 배양기 구입 계약 의뢰

○ 2023. 07. : 신축 및 배양기 계약 완료

□ 향후계획

○ 2023. 11. : 신축 및 배양기 납품 완료

○ 2023. 12. : 배양기 시운전 및 배양장 운영

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경

(단위 : 백만원)

구 분	당초	현재	증감율	비고
계	4,000	1,960	△49%
국 비	200	200	-
시 도 비	1,800	780	△43.3%
시군구비	2,000	980	△49%

사업명

바다의 문화시설 조성사업

담당자

000과 홍길동(☎000-0000)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역민들의 문화향유권을 증진하고 지역 문화자원과 예술작품을 결합하여

지역 정체석 확립 및 예술적 자긍심 고취

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.03. ~ 2025.12.

○ 위 치 : 신안군 비금면 구림리 785-54

○ 규 모 : 조형물 3,300㎡, 건축물 300㎡, 탐방로 조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 115백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비		20	0	5,620	109,360
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020.05. : 타당성조사 및 기본계획 수립용역

○ 2021.03. : 전시물품 제안서 접수

○ 2021.11. : 국유재산 매입완료

○ 2022.03. : 지방재정투자심사 완료

□ 향후계획

○ 2023.08. : 전시물품 계약

○ 2024.03. : 산책로 조성 실시설계 및 공사 착공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

자은 섬꽃사업부지 토지매입

담당자

뮤지엄파크지원과 박중석(☎240-3264)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천사대교 개통으로 자은면 관광활성화를 위해 자은 섬꽃사업부지 토지매입을 통해 다양한 체험과 도농교류 활동을 통해 지역 농업 생산 및 가공, 서비스와 관광자원을 결합 융복합 관광경제 활성화 방안 마련

○ 지역주민의 직ㆍ간접적인 참여를 유도하여 지역 관광 및 경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2026(5년)

○ 위 치 : 신안군 자은면 백산리 763-18번지 외 435필지

○ 규 모 : 토지매입 359필지, A=1,081,270㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 324백만원(군비 100%)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	324	54	46	37	187
국 비
시 도 비
시군구비	324	54	46	37	187
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 자은 섬꽃사업부지 토지매입 : 89필지, 265,340㎡, 11,481백만원

□ 향후계획

○ 천사대교 개통으로 이용객이 급증하고 있어 다양한 볼거리 및 자은 섬꽃사업 부지 토지매입으로 휴양문화 컨텐츠 확충과 이용객의 만족도를 제고하고 지역경제 활성화를 도모

○ 관광객 증가에 따른 자은 섬꽃사업부지 토지매입으로 차별화된 콘텐츠를 바탕으로 도서지역 균형 발전

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

증도 병풍보기항 어촌뉴딜300사업

담당자

섬발전진흥과 김경호(☎240-8417)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화, 생활밀착형 인프라 현대화 등을 통한 어촌 주민 삶의 질 제고 및 국가 균형 발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2024(3개년)

○ 위 치 : 신안군 증도면 병풍리 일원

○ 규 모 : 접안시설, 복합휴게실, 물양장조성, 선착장조성, 다목적센터 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,000	-	627	3,600	4,900
국 비	7,000	-	627	2,520	3,430
시 도 비	900	-	-	324	441
시군구비	2,100	-	-	756	1,029
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2022. 04.

○ 기본계획 승인 고시 : 2022. 12.

□ 향후계획

○ 공사 발주 : 2023. 09.

○ 공사 준공 : 2024. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

하의 옥도항 어촌뉴딜300사업

담당자

섬발전진흥과 김경호(☎240-8417)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화, 생활밀착형 인프라 현대화 등을 통한 어촌 주민 삶의 질 제고 및 국가 균형 발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2024(3개년)

○ 위 치 : 신안군 하의면 옥도리 일원

○ 규 모 : 접안시설, 부잔교, 물양장, 대합실 및 화장실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,920백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,920	-	434	2,491	3,391
국 비	4,844	-	434	1,744	2,374
시 도 비	623	-	-	224	305
시군구비	1,453	-	-	523	712
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2022. 04.

○ 기본계획 승인 고시 : 2022. 12.

□ 향후계획

○ 공사 발주 : 2023. 09.

○ 공사 준공 : 2024. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

흑산 홍도2구항 어촌뉴딜300사업

담당자

섬발전진흥과 김경호(☎240-8417)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화, 생활밀착형 인프라 현대화 등을 통한 어촌 주민 삶의 질 제고 및 국가 균형 발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2024(3개년)

○ 위 치 : 신안군 흑산면 홍도리 일원

○ 규 모 : 방파제 조성, 다목적센터, 해안길정비, 참살이집 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,000	-	627	3,600	4,900
국 비	7,000	-	627	2,520	3,430
시 도 비	900	-	-	324	441
시군구비	2,100	-	-	756	1,029
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2022. 04.

○ 기본계획 승인 고시 : 2022. 12.

□ 향후계획

○ 공사 발주 : 2023. 09.

○ 공사 준공 : 2024. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

압해 월포지구 연안정비사업

담당자

섬발전진흥과 김경호(☎240-8417)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연재해로부터 국토의 보존 및 기후변화에 따른 연안사고를 사전에 예방·복원하여 쾌적한 연안환경을 조성도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2024(3개년)

○ 위 치 : 신안군 압해읍 분매리,학교리 일원

○ 규 모 : 호안 1,770m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,496백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,496	-	201	2,127	3,940
국 비	4,547	-	201	1,489	2,758
시 도 비	546	-	-	191	355
시군구비	1,403	-	-	447	827
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 제3차 연안정비기본계획 고시 : 2020. 06.

○ 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2022. 02.

○ 공사 착공 : 2023. 08.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2024. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

비금 명사십리지구 연안정비사업

담당자

섬발전진흥과 김경호(☎240-8417)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연재해로부터 국토의 보존 및 기후변화에 따른 연안사고를 사전에 예방·복원하여 쾌적한 연안환경을 조성도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2024(3개년)

○ 위 치 : 신안군 비금면 구림리 일원

○ 규 모 : 침식방지 울타리 L=3.540m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,696백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,696	-	171	1,748	3,518
국 비	3,987	-	171	1,224	2,463
시 도 비	474	-	-	157	317
시군구비	1,235	-	-	367	788
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 제3차 연안정비기본계획 고시 : 2020. 06.

○ 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2022. 03.

□ 향후계획

○ 공사 발주 : 2023. 09.

○ 공사 준공 : 2024. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

신재생에너지 보급 융복합 지원사업

담당자

신재생에너지과 박성욱(☎8339)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 정부의 재생에너지 3020 이행계획에 따른 주택, 상업 및 공공건물 등의

밀집 지역에 태양광 및 태양열 등의 신재생에너지 설비를 구축하여 전기료

절감 등 도서 지역 삶의 질 개선

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 2022년 신재생에너지보급 융복합지원사업

❍ 사업기간 : ′22. 1. ~ ′22. 12.

❍ 사업위치 : 신안군 압해읍, 암태면, 안좌면, 팔금면 일원

❍ 사 업 량 : 675개소(태양광, 태양열)

❍ 사 업 명 : 2023년 신재생에너지보급 융복합지원사업

❍ 사업기간 : ′23 1. ~ ′23 12.

❍ 사업위치 : 하의면, 신의면, 장산면, 임자면, 도초면 일원

❍ 사 업 량 : 509개소(태양광, 태양열)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 5,323백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계		-	5,323	4,479
국 비			3,023	1,562
시 도 비			268	370
시군구비			1,520	2,102
지 방 채
민간자본			512	444
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

❍ 2020년 자은면 579가구 완료

❍ 2021년 비금면 267가구 완료

❍ 2022년 압해읍,안좌면,팔금면, 안좌면 633가구 완료

❍ 2023년 하의면,신의면,장산면,임자면,도초면 509가구 진행

□ 향후계획

❍ 2024년 지도읍, 증도면 416가구 추진

❍ 2025년 신안군 전체 대상으로 미설치 가구에 대해 설치 추진

□ 사업변경 내역(해당없음)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

농수산물 유통시설 단지조성

담당자

천일염지원과 김대영(☎240-8555)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천사대교 개통 및 연륙·연도교 추진으로 늘어나는 농수산물 물류 및 가공·유통·저장시설 등 적절하고 원활한 처리를 위한 단지조성으로 유통구조 개선 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2025년

○ 위 치 : 신안군 압해읍 송공리 804-2번지 일원

○ 규 모 : 면적(62,994㎡), 유통시설, 공동이용시설, 도로, 주차장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	15,200	-	3,000	4,000	8,200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	15,200	-	3,000	4,000	8,200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2020. 8. : 2020년 제5차 신안군 공유재산심의 완료

○ 2021. 6. : 전략환경영향평가 용역 완료

○ 2022. 3. : 군관리계획 결정(변경) 용역 완료

○ 2022. 7. : 지방재정투자 심사 의뢰

○ 2023. 4. : 기본 및 실시설계용역 추진

□ 향후계획

○ 2023. 8. : 중앙토지수용위원회 토지수용 신청

○ 2024. 8.～2025. 12. : 공사 착공 및 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

염전근로자 안심숙소 지원

담당자

천일염지원과 임주현(☎240-8409)

□ 사업목적 및 필요성

○ 염전의 고령화, 인구감소, 노동집약적인 어업 여건 등으로 천일염 생산 현장에서 부족한 노동력의 외부 고용에 따른 열악한 근로자 주거환경 개선하고 안정적인 노동력 확보 및 어촌경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년

○ 위 치 : 신안군 도초면 오류리 992번지 일원

○ 규 모 : 대지면적(2,438㎡), 연면적(1,400㎡), 건축규모(2인실 10호)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,000	-	-	1,000	2,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,800	-	-	600	1,200
시군구비	1,200	-	-	400	800
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2022.  9. : 적지조사 및 추진계획 수립

○ 2022. 11. : 기본 및 실시설계용역 추진

□ 향후계획

○ 2023. 8. : 건축공사 계약심사 및 발주

○ 2024. 8. : 준공 및 정산

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

압해 농공단지 조성사업

담당자

투자유치과 김윤선

(☎240-3294)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신안군은 지속된 인구감소(인구소멸지수 고위험군 8위) 및 농수산 1차 산업에 편중되어 부가가치를 창출할 수 있는 산업인프라와 제조시설이 부족한 실정임

○ 인구감소의 주된 원인을 양질의 일자리 부재로 보고 신규 농공단지를  조성하여 1차산업에 편중된 산업구조와 부족한 산업인프라 개선을 통해 청년이 돌아오는 여건을 마련하여 지방소멸위기 극복하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ~ 2026년

○ 위 치 : 신안군 압해읍 복룡리 1880번지 일원

○ 규 모 : 310,405㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 79,590백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	79,590	-	5,334	9,000	65,266
국 비	12,700	-	-	-	12,700
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	37,900	-	5,334	1,000	31,566
지 방 채	20,000	-	-	8,000	12,000
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	9,000	-	-	-	9,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○‘23. 03. ~ : 농공단지 산업단지계획(기본 및 실시설계) 수립 중

□ 향후계획

○‘23. 09. ~ ‘24. 02. : 주민의견청취, 합동설명회, 관계기관 협의 이행

○‘24. 02.           : 압해 농공단지 산업단지계획 승인·고시

개별 투자심사 사업 추진현황

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 변경사항 : 총사업비, 사업기간

○ 변경사유 : ‘22년 당초 투자심사 결과(재검토)에 따라 이행한 전문기관 타당성조사 결과 반영

○ 변경내역

가. 총사업비 변경

- (당초)479억원 → (변경)796억원

(단위 : 억원)

구 분	당 초		변 경		증액사유
	사업비	사업규모	사업비	사업규모
계	479	310,405㎡	796	310,405㎡	사업규모 변경없음
공사비	317	-	371	-	전문기관 (한국지방재정공제회) 타당성조사 결과 반영
보상비	91	-	135	-
용역비	21	-	-	-
기타 부대 비용	16	-	-	-
시설 부대 경비	-	-	80	-
각종 부담금 및 제세 공과금	-	-	138	-
예비비	34	-	72	-

나. 사업기간 변경

- (당초)2023년~2025년 → (변경)2023년~2026년

- 전문기관(한국지방재정공제회) 타당성조사 결과를 반영하여 지방비, 지방채발행 부담을 분산하여 신안군 재무건전성을 유지하고 원활한 사업추진을 위해 사업기간조정

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

자은 백길해변 관광활성화 사업

담당자

투차유치과 오용택(☎240-8332)

□ 사업목적 및 필요성

○ 백길해변 ~ 마리나(예정)를 연계한 도로조성을 통해 백길해변 해양관광 및 지역경제 활성화와 늘어나는 관광수요에 효율적으로 대응하기 위한 정비사업을 수행하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : `23. 02~ `24. 12.

○ 위 치 : 자은면 유각리 산236-9번지 일원

○ 규 모 : B=10.0～15.0m, L=1,129.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비	1,300	-	-	-	1,300
시군구비	1,300	-	-	-	1,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 기본계획 및 타당성 조사 용역 추진 : 2021. 10. ∼ 2021. 12.

○ 지방재정투자 심사 의뢰 : 2022. 07.

□ 향후계획

○ 실시계획 용역 및 토지보상 추진예정 : 2024. 02. ∼ 2024. 04.

○ 사업발주예정 : 2024. 04.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

김 육상채묘 및 냉동망 시설

담당자

해양자원과 김영운(☎240-8603)

□ 사업목적 및 필요성

○ 김 육상채묘 및 냉동망 시설을 지원하여 우량 종묘의 안정적인 생산을        통해 친환경 김 양식산업 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 2. ~ 9.

○ 위 치 : 지도읍 봉리 1400 번지

○ 규 모 : 김 포자배양장, 육상채묘장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000	-	1,931
국 비
시 도 비	1,000	-	966
시군구비	600	-	579
지 방 채
민간자본	400	-	386
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 김 육상채묘 및 냉동망 시설 지원사업 추진 완료

- 해양자원과-5901(22.12.22.)호 [2022년 김 육상채묘 및 냉동망시설 지원사업       보조금 교부 확정 통보]

□ 향후계획

○ 사업정산서 제출 및 잔액 69백만원 납부 추진

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

쥐노래미 산란서식장 조성사업

담당자

해양자원과 김민재(☎240-8613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 기후변화 및 남획 등으로 수산자원량 급감함에 따라 산란·서식장

조성을 통한 지속 가능한 수산자원 공급 거점 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2026(5년간)

○ 위 치 : 비금 노대도 인근해역

○ 규 모 : 인공어초 투하, 수산종자 방류, 효과조사 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,000		1,000	1,000	3,000
국 비	2,500	-	500	500	1,500
시 도 비
시군구비	2,500	-	500	500	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ’22. 1. / ’23. 1. : 해양수산부 공모사업 선정(2건)

○ ’23. 2. : 쥐노래미(2년차) 산란서식장 조성 계획 수립

○ ’23. 6. ~ 12. : 인공어초 투하 등 산란서식장 조성 및 효과조사

(위탁사업비 500백만원 집행)

□ 향후계획

○ 22~26년, 5년간 매년 10억 원씩 인공어초, 종자방류, 효과조사 등 사업추진

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

지도읍 공립 치매전담형 종합요양시설 신축

담당자

주민복지과 정승현(☎240-8943)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구 고령화와 치매, 중풍 등 일상 생활이 어려운 노인 인구수 증가 등에

따른 가족 돌봄 비용부담 경감과 장기적인 요양서비스가 필요한 어르신들에

대한 노후생활 안정과 삶의 질 향상 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2024년

○ 위 치 : 신안군 지도읍 탄동리 산177-1번지 일원

○ 규 모 : 연면적 1,000㎡(지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	420	-	80	312	100
국 비	336	-	6	250	80
시 도 비	42	-	1	31	10
시군구비	42	-	1	31	10
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 사업확정, 토지매입, 투자심사   : 2020. 10. ~ 2022. 03.

○ 건축기획, 공공건축 사전검토    : 2022. 05. ~ 2022. 10.

○ 지반 조사 등 건축 설계용역    : 2023. 01. ~ 2023. 10.

□ 향후계획

○ 공사 추진 : 2023. 11. ~

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

안좌면 공립 치매전담형 종합요양시설 신축

담당자

주민복지과 정승현(☎240-8943)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구 고령화와 치매, 중풍 등 일상 생활이 어려운 노인 인구수 증가 등에

따른 가족 돌봄 비용부담 경감과 장기적인 요양서비스가 필요한 어르신들에

대한 노후생활 안정과 삶의 질 향상 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2024년

○ 위 치 : 신안군 안좌면 남강리 180-1번지 일원

○ 규 모 : 연면적 1,000㎡(지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	420	-	80	312	100
국 비	336	-	6	250	80
시 도 비	42	-	1	31	10
시군구비	42	-	1	31	10
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 사업확정, 토지매입, 투자심사   : 2020. 10. ~ 2022. 03.

○ 건축기획, 공공건축 사전검토    : 2022. 05. ~ 2022. 10.

○ 지반 조사 등 건축 설계용역    : 2023. 01. ~ 2023. 10.

□ 향후계획

○ 공사 추진 : 2023. 11. ~

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시)

사업명

신안군 북부권역 갯벌식생 복원사업

담당자

세계유산과 주성영(☎8646)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양생물들의 서식지 조성을 통한 생물 종 다양성 복원 및 수산자원

증대로 지역주민 소득증대 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2025년(4년)

○ 위 치 : 전라남도 신안군 지도읍 사옥도 갯벌 일원

○ 규 모 : 갯벌 식생복원(염생식물 8㎢, 잘피군락 6.4㎢, 탐방로 1식)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계		-	1,059	3,383	10,558
국 비			741	2,928	7,390
시 도 비			63.5	251	1,742
시군구비			254.5	204	1,426
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2022. 12. 해양환경공단 위·수탁 협약

○ 2023. 03. 기본 및 실시설계 착수보고회

○ 2023. 04. ~ 갯벌생태계 모니터링

□ 향후계획

○ 2023. 실시설계 및 인·허가 사항 수행

○ 2022.~2025. 생태계 모니터링

○ 2024.~2025. 염생식물 식재 및 탐방시설 설치

□ 사업변경 내역(해당없음)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

신안군 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업

담당자

친환경농업과

박우근(☎240-8389)

□ 사업목적 및 필요성

○ 임대형 스마트팜 조성을 통해 스마트팜에 도전하는 청년들이 적정한 임대료로 창농하여 재배역량 향상, 농업 경영의 기회 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년

○ 위 치 : 신안군 도초면 발매리 1391-1 번지 일원

○ 규 모 : 사업부지 (7.1ha), 온실부지(4.0ha)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  26,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	26,200	10,000	10,000	14,000
국 비	14,000	7,000	7,000	7,000
시 도 비	1,200	600	600	600
시군구비	11,000	2,400	2,400	6,400	2,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 세부 실시설계 완료 용역보고회 개최

○ 지역특화 임대형스마트팜 기반조성 공사중

□ 향후계획

○ 온실 세부 실시설계 완료 및 온실 공사 발주

○ 온실 및 지반조성 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

채소류 출하조절시설 지원사업

담당자

친환경농업과 김종국(☎240-8391)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수급변동이 큰 주요채소류의 수급 및 가격안정 위해 산지에서 상시출하를 조절할 수 있는 저온저장시설 및 가공시설 설치 필요

□ 사업개요

○ 보조사업자 : 신안농업협동조합(포기) → 신안군(변경신청)

○ 기 간 : 2022~2023

○ 위 치 : 당초) 안좌면 창마리 129번지 일대 → 변경) 압해읍 신용리 601번지

○ 규 모 : 4,272㎡ 규모 저온저장시설 및 부대시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계				376	9,624
국 비	4,000			150	3,850
시 도 비	900			34	866
시군구비	2,100			79	2,021
지 방 채
민간자본
기 타	3,000			113	2,887

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 기존 보조사업자 신안농업협동조합 사업포기, 신안군 사업계획변경 신청

○ 현재 농식품부 사업계획변경 심의 중

□ 향후계획

○ 23.08. 사업계획변경 후 실시설계 입찰공고

○ 24.11. 공사준공 및 사업 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 기존 사업자 신안농협 사업포기에 따라 신안군이 사업주체가 되고 목포신안농협조합공동법인에 위탁운영하는 내용의 사업계획변경 신청

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

특용작물생산유통현대화사업

담당자

친환경농업과 김종국(☎240-8391)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가격변동이 심한 수급불안 품목인 대파 대체작목으로 재래땅콩을 집중육성하고 품질규격화를 통해 지역농가 소득안정 도모

□ 사업개요

○ 사업자 : 신안군

○ 기 간 : 2022~2024

○ 위 치 : 자은면 백산리 633-60 외 4필지

○ 규 모 : 661㎡ 규모 땅콩가공공장 및 기계장비류

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계				108	3892
국 비	2,000			54	1946
시 도 비
시군구비	,000			54	1946
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 땅콩가공시설 설계용액 입찰공고 및 제안서 접수 완료

□ 향후계획

○ 23.08.16. 땅콩가공시설 설계용역계약 제안서평가위원회 개최

○ 24.11.   공사준공 및 사업 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시)

사업명

암태 암석정원 조성사업

담당자

정원산림과 이순나(☎240-8452)

□ 사업목적 및 필요성

○ 큰바위(岩太)라는 이름에 걸맞게 정원 전체에 바위산이 둘러 쌓여 있으며      자연유산과 역사자원을 활용한 암석을 테마로 한 특색있인 지방정원 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2025년(4개년)

○ 위 치 : 전라남도 신안군 암태면 도창리 889번지 일원

○ 규 모 : 373,792㎡(약 37ha)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,000		125	1,675	7,200
국 비
시 도 비	4,950	0	69	921	3,960
시군구비	4,050	0	56	754	3,240
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2022. 12.   : 암태 암석정원 기본계획용역 완료

○ 2023. 08. ~ : 암석정원 실시설계·조성계획 승인 용역 추진

□ 향후계획

○ 2023. 12. ~ : 암석정원 인허가 및 건축 실시설계 추진

○ 2024. 01. ~ : 지방정원 조성사업 토목 및 조경 발주

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 신안군에서 ‘22년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2022년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-3. 민간투자사업

우리 신안군에서 ‘22년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후
BTL		해	당	없	음
BTO

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2022년까지는 집행액(결산기준), 2023년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비