11-1. 투융자심사 대상사업

우리 군에서 현재 추진 중인 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총사 업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
신안장도 산지습지 보전이용시설	2,928	1,812	1,017		2013	2011	92
비금면 농어촌폐기물 종합처리시설 설치	2,000	882	1,118		2013	2012	85
흑산진리생태 하천복원사업	3,000	34	850	2,116	2014	2012	20
세계생태수도 섬조성사업	12,000	0	1,000	11,000	2017	2012	20
임자굴도해양펠리스	4,000	2,000	1,000	1,000	2015	2011	20
도덕도 하이원아일랜드	4,000	3,600	400		2015	2011	20
임자 만구음관 복원조성사업	4,800	251	500	1,967	2014	2011	30
예술의 섬 조성공사	9,000	132	3,201	5,667	2014	2011	10
김환기미술관 건립	13,000	571	3,295	9,134	2014	2011	10
수산물 처리저장시설사업	3,000	20	2,980	-	2013	2012	60
안좌~자라간 연도교가설	46,6170	15,243	7,178	25,489	2016	2010	30

‣ (대상사업) 2012년까지 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 ‘13.6말 현재 추진 중에 있는 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명	신안장도 산지습지보전 이용시설	담당자	환경공원과 신 기 문 (☎061)240-8882)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 도서지역(섬)최초의 산지습지를 찾는 국내외 탐방객은 매년 증가추세에 있으나 급경사,굴곡부가 심하여 탐방객 이용불편과 안전사고 발생우려. ○ 산지습지의 생태자원과 지형지세를 최대 활용 탐방로 및 부대시설을 확충하여 탐방객 편의제공 및 자연 체험형 환경교육장을 조성하고 주변 관광자원과 연계한 관광코스로 개발하여 지역경제 활성화에 기여 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2011. 01. ～ 2013. 12. 31 ○ 위 치 : 신안군 흑산면 비리(장도)산109-1 ○ 시 공 사 : 주)참건설, 주)일흥건설, 협진개발, 주)서해전설 ○ 사업규모 : 습지홍보관및부대시설, 탐방로, 홍보관내부시설 등 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 2,928백만원(국비 1,752, 군비 1,176) ○ 지금까지 집행액 : 2,671백만원 - 2011 : 42백만원(국비 21, 군비 21) - 2012 : 1,830백만원(국비 915, 군비 915) - 2013 : 800백만원(국비 580, 군비 220) ○ 향후 소요액 : 257백만원(2013년) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%) ○ 신안장도 산지습지 보전이용시설 습지홍보관 및 부대시설(716㎡) ○ 신안장도 산지습지 보전이용시설 탐방로 (1.7㎞) ○ 신안장도 산지습지 보전이용시설 홍보관내부 시설 1식 □ 향후계획 ○ 신안장도 산지습지 홍보관 주변 정비사업(추진중 60%) - 물양장, 게비온설치 등 □ 사업변경 내역 ○ 신안장도 산지습지 보전이용시설 탐방로 - 당초 3.4㎞ - 변경 1.7㎞ ※ 공원계획변경 승인에 준한 설계변경

사업명	비금 농어촌 폐기물 종합시설 설치	담당자	환경공원과 김병수(☎240-8448)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 쓰레기 발생량 증가 및 소각로 노후화로 쓰레기 처리시설 정비 및 설치 필요 ○ 처리시설 설치로 지역주민의 쾌적한 생활환경 조성 및 보건위행 향상 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2012 ～ 2013 ○ 위 치 : 신안군 비금면 죽림리 41번지 일원 ○ 시공사 : 청수종합건설 외 ○ 사업규모 : 기존매립장정비, 신규매립시설 설치(962㎡) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 2,000백만원(국비 1,500, 시군구비 500) ○ 지금까지 집행액 : 1,692백만원 ․ 2012 : 882백만원(국비 750, 군비 132) ․ 2013 : 810백만원(국비 442, 군비 368) ○ 향후 소요액 : 308백만원 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%) ○ 기존 매립장 정비 완료 ○ 신규 매립시설 설치 중 □ 향후계획 ○ 2013. 09. 30 준공 □ 사업변경 내역 ○ 사업규모 : 당초 - 기존매립장 존치, 신규매립장 조성 변경 - 기존매립장 철거 및 쓰레기 선별, 신규매립장 조성, 진입도로 포장(L = 430m)

사업명	진리천생태하천복원사업	담당자	환경공원과 이경규 (☎240-8929)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 흑산도의 진리천은 도서지역에서는 드물게 형성된 소하천으로, 멸종위기 종인 노랑부리백로 등 장거리를 이동하는 165종의 철새들에게 중요한 중간 휴식지로, 콘크리트 구조를 친환경적으로 복원하여, 담수와 해수가 만나는 기수역 생태계의 복원 및 철새의 안정적 휴식처 제공하고 지역 주민의 생활환경 개선 및 새로운 관광자원화. □ 사업개요 ○ 기간 : 2012. 01. ～ 2014. 12. ○ 위치 : 신안군 흑산면 진리소하천 1.7 km 구간 ○ 사업규모 : 기수역 습지 복원, 소하천 여울 3개소 조성 등 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 3,000백만원(국비 1,800, 시군구비 1,200) ○ 지금까지 집행액 : 322백만원(국비 193, 군비 129) ․ 2012 : 34백만원, 2013 : 288백만원 ○ 향후 소요액 : 2,678백만원(국비 2,207, 군비 471) ․ 2013 : 562백만원, 2014 : 2,116백만원 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%) ○ 기본계획 및 실시설계 용역 도 생태하천심의회 결과 보완 ○ 생태하천 편입부지 매입 (총 16필지 중 4필지 매입) □ 향후계획 ○ 기본계획 및 실시설계 용역 행정절차 완료(환경영향평가 등) : 2013. 09. ○ 생태하천 편입부지 매입 완료 (총 12필지) : 2013. 09. ○ 진리천 생태하천 복원공사 발주 : 2013. 10 □ 사업변경 내역 ○ “해당없음”

사업명	세계 생태수도 섬 조성	담당자	환경공원과 신선희 (☎061 240-8442)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 갯벌과 철새등 자연생태 자원이 풍부한 다도해해상국립공원 및 유네스코 생물권 조전지역의 중심부인 도초섬의 독특한 생태자원을 활용하여 주변 관광자원과 연계한 녹색 생태관광 기반 구축 필요 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2013 ～ 2017(5개년) ○ 위치 : 도초면 만년리 1314일원 ○ 시공사 : (주)지엘기술 대표 윤인구 ○ 사업규모 : 세계 생태수도 섬 방문자센터 1식(폐교 리모델링)외 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 12,000백만원(국비 6,000백만원, 시군구비 6,000백만원) ∙‘13년도 사업비 : 1,000백만원(국비 500, 군비 500) ○ 지금까지 집행액 : 600백만원(연도별, 재원별 등) ∙‘13년도 집행액(’13. 8월 기준) ○ 향후 소요액 : 1,100백만원(연도별, 재원별 등) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%) ○ ‘13. 05. : 세계 생태수도 섬 조성 마스터플랜 용역발주 ○ ‘13. 06. : 세계 생태수도 섬 방문자 센터 리모델링 설계 및 심의완료 ○ ‘13. 07～’13 . 11. : 세계 생태수도 섬 방문자센터 리모델링 공사 추진 □ 향후계획 ○ ‘13. 10. : 세계 생태수도 섬 조성 용역 주민설명회 ○ ‘13. 12. : 방문자센터 리모델링 공사 정상추진 □ 사업변경 내역 ○ “해당없음”

사업명	증도 도덕도 하이원 아일랜드	담당자	경제투자과 박승기(☎240-8332)
□ 필요성 및 기대효과 ○ ‘新安船’으로 통칭되는 선체와 유물 총 3만여점이 출토된 신안해저유물 발굴은 활발했던 한중일 국제교역 속에서 증도의 위상 확인 ○ 천혜의 관광자원과 해저유물 발굴지의 입지를 특성화하고, 스로시티에 부합한 각종 체험을 연계한 고품격 관광휴양형 리조트 단지 조성 □ 사업개요 ○ 기간 : 2009~2015 ○ 위치 : 신안군 증도면 방축리 산 326외 7필지 ○ 시공사 : 하이원아일랜드 ○ 사업규모 : 부지-77,851㎡, 건물-해양리조트(34동-257실), 컨벤션, 음식타운 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 27,400백만원(국비 2,000, 시도비 , 시군구비 2,000, 기타 23,400) ○ 지금까지 집행액 : 1,000백만원원(2012:10억원, 국비 50, 군비 50%) ○ 향후 소요액 : 3,000백만원(2013년 10억원, 2014년 20억원, 국비 50, 군비 50%) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %) ○ ‘08.10~’09.05 : 증도 도덕도 유물박물관 및 부대시설 기본계획(신안군) ○ ‘09. 10. : 증도 도덕도 개발사업부지 매입완료(투자자) ○ ‘09.12 : 투자협약(MOU) 체결 ○ ‘11.05 : 2종 지구단위 관리계획변경 고시 완료 ○ ‘13.01~’14.12 : 기반시설(진입도로 착공) □ 향후계획 ○ ’13.12 수상가옥 조성 ○ ‘14.02 유물전시관 조성 ○ ‘14.08 복합중심시설조성 □ 사업변경 내역 ○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	임자굴도해양펠리스	담당자	경제투자과 박승기(☎240-8332)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 다도해 자연경관과 해양자원(섬+에너지+예술), 음식문화(Slow Food)를 접목하여 삶에 변화를 주는 休·味·樂의 친환경 그린아일랜드 개발 ○ 증도면 슬로우시티와 연계한 ‘한․중․일’ 음식촌과 누드비치존, 요트 계류장을 조성하여 관광수요창출 및 해양관광자원화 전기 마련 □ 사업개요 ○ 기간 : 2009~2015 ○ 위치 : 임자면 재원리 굴도일원(산 294번지외 17필지) ○ 시공사 : (주)대영종합레저 ○ 사업규모 : 79,340㎡(24,000평)해양펜션, 해수스파, 에너지파크, 마리나, 음식타운 등 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 4,000백만원(국비 2,000, 시도비 , 시군구비 2,000, 기타 ) ○ 지금까지 집행액 : 3,600백만원 - ‘10년:16억, ‘11년:14억원, ’12년 6억, ‘13년 4억,국비 50, 군비 50% ○ 향후 소요액 : 3, □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %) ○ ‘08. 6. 개발대상부지 토지매입 완료(18필지) ○ ‘09. 5. 해양펜션단지 투자협약(전남도, 신안군, 투자자) ○ ‘09. 6. 2010년도 해양펜션단지 조성사업 지구선정(국토부, 전남도) ○ ‘10. 4. 도시관리계획 변경결정 및 지형도면고시 ○ ‘11. 5. 기반시설 1차(파제제) 완료 ○ ‘12. 6. 기반시설 2차(방파제, 선착장) 최소 안전단면 완료. □ 향후계획 ○ ‘13. 2. 민간 사업 리조트 1단계(5동) 사업시행 예정 ○ ‘13. 12. 민간 사업 리조트 1단계 사업 완료 예정 □ 사업변경 내역 ○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	임자 만구음관복원조성사업	담당자	문화관광과 허신욱(☎240-8358
□ 필요성 및 기대효과 ○ 조선시대 시․서․화 3절의 대가로 활약한 조희룡 선생의 흔적을 복원하여 문화컨텐츠 확보와 학습의 장으로 활용 □ 사업개요 ○ 기간 : 2011~2014 ○ 위치 : 신안군 임자면 이흑암리 ○ 시공사 : 부국건설(주) ○ 사업규모 : 5,000㎡조성(만구음관 복원, 공원조성, 부대시설 등) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 :4,800백만원(광특2,880, 시군구비 1,920) ○ 지금까지 집행액 : 825백만원(광특495 시군비330) ○ 향후 소요액 : 3,975백만원(광특2,385, 시군비1,590) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%) ○ 계약 및 착공 : 2013. 02 ○ 사업완료 : 2014. 12 □ 향후계획 ○ 준공예정 : 2014년 12월 □ 사업변경 내역 ○ 해당없음

사업명	예술의 섬 조성공사	담당자	문화관광과 나훈경 (☎240-8978)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 한국을 대표하는 서양화가 김환기 화백의 고향인 안좌도를 문화 예술의 고장으로 조성하여 지역 이미지 제고 및 다양한 콘텐츠 개발을 통한 지역경제 활성화에 기여 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2013. 05. 01 ~ 2014. 12 ○ 위치 : 신안군 안좌면 일원 ○ 시공사 : (주)청한 ○ 사업규모 : 예술창작공방 리모델링(안창초등학교), 지역문화콘텐츠, 역사의 시간, 상징조형물 등 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 9,000백만원(국비 5,400, 군비 3,600) ○ 지금까지 집행액 : 3,333백만원 - 2012년 132백만원(국비) - 2013년 3,201백만원(국비 2,818 군비 383) ○ 향후 소요액 : 5,667백만원 - 2014년(국비 2,450 군비 3,217) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%) ○ 2011. 05 : 기본계획 용역 완료 ○ 2011. 10 : 투융자심사 완료 ○ 2012. 12 : 실시설계 용역 완료 ○ 2013. 05 : 시설사업(건축․토목․조경) 1차분 착공 □ 향후계획 ○ 2014. 01 : 시설사업(조경) 2차분 착공 ○ 2014. 12 : 사업완료 □ 사업변경 내역 ○ 해당없음

사업명	김환기 미술관 건립	담당자	문화관광과 나훈경 (☎240-8978)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 한국을 대표하는 서양화가로서 신안군 안좌면 출신 수화 김환기 화백의 가치를 국내․외 확산 문화예술의 대표 고장으로서 위상강화를 통해 지역 이미지 제고 및 다양한 콘텐츠개발을 통한 지역경제 활성화 도모 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2009. ~ 2014. ○ 위 치 : 신안군 안좌면 읍동리 730 ○ 시공사 : 미 발주(실시설계 : 디자인캠프 문박 디엠피) ○ 사업규모 : 김환기 미술관, 주변공원 정비, 기획전시실, 상설전시실, 교육실, 체험실, 홍보실, 주차장, 휴게실등 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 13,000백만원(국비 2,300, 군비 10,700) ○ 지금까지 집행액 : 571백만원(국비) ○ 향후 소요액 : 9,134백만원 - 2014년(국비 300 군비 8,834) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 중) ○ 2011. 12 : 타당성조사 및 기본용역 완료 ○ 2012. 03 : 투융자 심사 완료 ○ 2013. 06 : 제안공모(협상에 의한 계약)발주 ○ 2012. 12 : 실시설계 착수보고회 □ 향후계획 ○ 2013. 11 : 실시설계 완료 후 계약심사 ○ 2014. 01 : 사업발주 □ 사업변경 내역 ○ 해당없음

사업명	수산물 처리저장시설사업	담당자	해양수산과(☎240-8910)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 양륙된 수산물의 신속한 처리와 저장을 통해 수산물 안전성 확보 및 거래수산물에 대한 신뢰도 회복을 통한 어가 소득증대 도모 □ 사업개요 ○ 기간 : 2011. 4월 ～ 2013. 9월 ○ 위치 : 지도읍 읍내리 570-56번지 ○ 시공사 : 진남토건 주식회사 ○ 사업규모 : 수산물 처리․저장시설(제빙, 냉장냉동 시설 등) 1식 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 3,000백만원(광특1,500, 시군구비1,200, 자담 300) ○ 지금까지 집행액 : 1,598백만원(연도별 2012년-20, 2013년-1,578, 재원별 국비799, 군비639, 자담160) ○ 향후 소요액 : 1,402백만원(연도별 2013년-1,402, 재원별 국비701, 군비561, 자담140) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : %) ○ 기계설비 공사 추진 중(공정율 : 60%) □ 향후계획 ○ 건축․기계 공사 및 기타 공정 완료 : 2013. 09. 31. □ 사업변경 내역 ○ 해당없음

사업명

안좌~자라간 연도교가설공사

담당자

도서개발과 천중영(☎240-8482)

□ 필요성 및 기대효과

○ 도서지역 교통편익 증진 및 지역 균형발전 도모

○  신안군 해양관광자원의 연계 및 시너지 극대화

□ 사업개요

○ 기    간 : 2011년 ～ 2016년

○ 위    치 : 안좌면 자라리 ～ 안좌면 복호리

○ 시 공 사 : 금호산업(주) 외 4개사

○ 사업규모 : L=670m(접속도로 1,333m), B=10.0～12.2m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 46,617백만원(국비 32,632, 도비 6,992.5, 군비 : 6,992.5)

구 분	총 괄	2012년까지 (2011년)	2013년 계획	2014년 이후	비고
총사업비	46,617	15,243 (6,470)	7,178	25,489
공 사 비	40,917	13,964 (6,370)	6,478	21,768
감 리 비	2,240	600 (100)	500	1,140
보상비 및 기타	3,460	679 (-)	200	2,581

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :30%)

◦ 교각 가시설 설치 완료 : P1, P2

- P1 기초 Con'c타설 완료

◦ 교각 기초 Con'c타설 완료 : P3

◦ 교대 기초 Con'c타설 완료 : A2

□ 향후계획

○ 교각(P1, P3)완료, 상부 주두부 완료 추진

○ 주탑(P2)하부구조 완료 추진

○ 복호리 통로 암거 및 배수구조물 추진