11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 군에서 ‘13년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
세계 생태수도 섬 조성	12,000		1,000	11,000	2017	2012	30
임자 만구음관 복원조성사업	4,800	251	500	1,967	2014	2011	30
예술의 섬 조성공사	9,000	132	3,201	5,667	2014	2011	10
김환기미술관 건립	13,000	571	3,295	9,134	2015	2011
임자 전장지구 농어촌마을하수도 정비	8,369			8,369	2016	2013
비금.도초 면단위 하수처리장 설치	16,426			16,426	2016	2013

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2013년에 추진한 사업

‣ 총사업비는 투융자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘13년말 기준으로 작성

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

세계 생태수도 섬 조성

담당자

환경공원과 신기문(☎240-8441)

□ 사업목적 및 필요성

□ 섬 지역의 가치있는 생태자원을 친환경적으로 이용, 세계 생태표준을

제시하고 생태관광 프로그램으로 개발하여 생태교육과 생태체험관광이

결합된 생태메카로 조성

□ 사업개요

□ 기 간 : 2013 ~ 2017(5년)

□ 위 치 : 전남 신안군 도초면 만년리 1314번지 일원

□ 규 모 : 섬 생태체험 방문자센터, 야외체험학습장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	12,000		526	2,274	9,200
국비(광특)	6,000		263	1,137	4,600
시군구비	6,000		263	1,137	4,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

□ 2013. 06.  폐교 리모델링 설계용역 완료

□ 2013. 08.  마스터 플랜 및 지역교육사업 용역 착수

□ 2014. 07.  폐교 리모델링 공사(본관) 착공

□ 향후계획

□ 2014. 04.  폐교 리모델링 공사(본관) 준공 및 후관 리모델링 설계용역 완료

□ 2014. 06.  마스터 플랜 및 지역교육사업 용역 완료

□ 2014. 08.  폐교 리모델링 공사(후관) 착공

□ 2014년 이후

․ 야외 체험학습장 조성, 생태 선진지 연계 인프라 및 탄소제로섬 구축

사업명	임자 만구음관복원조성사업	담당자	문화관광과 나훈경(☎240-8978)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 조선시대 시․서․화 3절의 대가로 활약한 조희룡 선생의 흔적을 복원하여 문화콘텐츠 확보와 학습의 장으로 활용 □ 사업개요 ○ 기간 : 2011~2014 ○ 위치 : 신안군 임자면 이흑암리 ○ 시공사 : 부성종합건설(주) ○ 사업규모 : 5,000㎡조성(만구음관 복원, 공원조성, 부대시설 등) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 :4,800백만원(광특 2,880, 군비 1,920) ○ 지금까지 집행액 : 1,436백만원(광특 861 군비 575) ○ 향후 소요액 : 3,364백만원(광특 2,019, 군비 1,345) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%) ○ 계약 및 착공 : 2013. 02 ○ 사업완료 : 2014. 12 □ 향후계획 ○ 준공예정 : 2014년 12월

사업명	예술의 섬 조성공사	담당자	문화관광과 나훈경 (☎240-8978)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 한국을 대표하는 서양화가 김환기 화백의 고향인 안좌도를 문화 예술의 고장으로 조성하여 지역 이미지 제고 및 다양한 콘텐츠 개발을 통한 지역경제 활성화에 기여 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2013. 05. 01 ~ 2014. 12 ○ 위치 : 신안군 안좌면 일원 ○ 시공사 : (주)청한 ○ 사업규모 : 예술창작공방 리모델링(안창초등학교), 지역문화콘텐츠, 역사의 시간, 상징조형물 등 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 9,000백만원(국비 5,400, 군비 3,600) ○ 지금까지 집행액 : 3,333백만원 - 2012년 132백만원(국비) - 2013년 3,201백만원(국비 2,818 군비 383) ○ 향후 소요액 : 5,667백만원 - 2014년(국비 2,450 군비 3,217) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%) ○ 2011. 05 : 기본계획 용역 완료 ○ 2011. 10 : 투융자심사 완료 ○ 2012. 12 : 실시설계 용역 완료 ○ 2013. 05 : 시설사업(건축․토목․조경) 1차분 착공 ○ 2014. 06 : 시설사업(건축․토목․조경) 1차분 준공 ○ 2014. 06 : 시설사업(건축․토목․조경) 2차분 착공 □ 향후계획 ○ 2014. 12 : 사업완료

사업명	김환기 미술관 건립	담당자	문화관광과 나훈경 (☎240-8978)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 한국을 대표하는 서양화가로서 신안군 안좌면 출신 수화 김환기 화백의 가치를 국내․외 확산 문화예술의 대표 고장으로서 위상강화를 통해 지역 이미지 제고 및 다양한 콘텐츠개발을 통한 지역경제 활성화 도모 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2009. ～ 2014. ○ 위 치 : 신안군 안좌면 읍동리 730 ○ 시공사 : 미 발주(실시설계 : 디자인캠프 문박 디엠피) ○ 사업규모 : 김환기 미술관, 주변공원 정비, 기획전시실, 상설전시실, 교육실, 체험실, 홍보실, 주차장, 휴게실등 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 13,000백만원(국비 2,300, 군비 10,700) ○ 지금까지 집행액 : 571백만원(국비) ○ 향후 소요액 : 9,134백만원 - 2014년(국비 300 군비 8,834) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 사업발주) ○ 2011. 12 : 타당성조사 및 기본용역 완료 ○ 2012. 03 : 투융자 심사 완료 ○ 2013. 06 : 제안공모(협상에 의한 계약)발주 ○ 2012. 12 : 실시설계 착수보고회 ○ 2014. 04 : 실시설계 완료 후 계약심사 ○ 2014. 06 : 사업발주 □ 향후계획 ○ 2015. 02 : 사업 준공

사업명

임자 전장지구 농어촌마을하수도정비사업

담당자

상하수도사업소

윤선민(☎240-8494)

□ 필요성 및 기대효과

○ 임자면 전장지구에서 배출되는 생활오․폐수를 정화하여 수질오염방지 및 생활환경 개선을 도모

○ 면소재지에서 발생되는 생활하수로 급속도로 오염되어가고 있는 주변 환경오염 방지와 건전한 도시발전

□ 사업개요

○ 기간 : 2014～2016

○ 위치 : 신안군 임자면 도찬리 일원

○ 사업규모 : 소규모공공하수처리시설 1개소(Q=100㎥/일),

오수관거 신설 L=4.96km, 오수중계펌프장 3개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,369백만원(환특5,858, 시군비 2,511)

구 분	총 괄	2014년	2015년 계획	2016년 이후	비고
총사업비	8,369	1,143	3,033	4,193
국 비	5,858	800	2,123	2,935
지 방 비	2,511	343	910	1,258

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 계약 및 착공 : 2014. 09

○ 사업완료 : 2016. 08

□ 향후계획

○ 준공예정 : 2016년 08월

□ 사업변경 내역

○ 환경부 총사업비 변경완료(당초 4,176백만원 → 변경 8,369백만원)

사업명

비금·도초 면단위

하수처리장 설치사업

담당자

상하수도사업소

윤선민 (☎240-8494)

□ 필요성 및 기대효과

○ 비금면 도고2지구, 도초면 나포지구에서 배출되는 생활 오․폐수를 정화하여 수질오염방지 및 생활환경 개선을 도모

□ 사업개요

○ 기간 : 2014~2016

○ 위치 : 신안군 비금면 지당리, 도초면 외남리 일원

○ 사업규모 : 처리장 - 비금 150㎥/일, 도초 65㎥/일

오수관로 – 비금 13.87㎞, 도초 4.78㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,426백만원(국비 11,498, 지방비 4,928)

구 분	총 괄	2014년	2015년 계획	2016년 이후	비고
총사업비	16,426	714	9,427	6,285
국 비	11,498	500	6,599	4,399
지 방 비	4,928	214	2,828	1,886

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 계약 및 착공 : 2014. 09

○ 사업완료 : 2016. 08

□ 향후계획

○ 준공예정 : 2016년 08월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음