		2013년도 지방자치단체 재정공시 편람

하의 해양테마파크 조성사업

	목 적
◦ 김대중 전 대통령의 업적을 기리고, 관광객과 지역주민의 휴식 및 문화체험 공간 확보로 지역경제 활성화에 기여

■ 사 업 개 요

◦ 위       치 : 신안군 하의면 후광리 일원

◦ 사  업  량 : 유스호스텔, 전시관, 노벨미로공원, 기념탑 등

◦ 총 사 업 비 : 8,570백만원(‘13년 사업비 : 1,100백만원)

◦ 사 업 기 간 : 2010년 ~ 2015년

■ 추진현황 및 추진계획

◦ ‘08년 7월 : 기본계획 완료

◦ ‘12년 2월 : 실시설계 완료

◦ ‘13년 2월 : 사업 계약 및 착공

◦ ‘15년 4월 : 사업 준공예정

■ 기 대 효 과

◦ 관광객과 지역주민의 휴식공간 확보는 물론 광광자원으로 활용하여 직역브랜드       제고로 지역주민 소득증대에 기여

■ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)
	합계	2011년이전	2012년	2013년	2014년 이후
사업비	8,570	1,425	1,350	1,100	4,695

만구음관 복원 조성사업

	목 적
◦ 조희룡 선생의 유배생활 흔적을 복원하여 후손들의 문화탐방, 체험학습장으로 활용하고 지역경제 활성화에 기여

■ 사 업 개 요

◦ 위       치 : 신안군 임자면 이흑암리 일원

◦ 사  업  량 : 적거지복원, 돌담복원, 야외상징물 등

◦ 총 사 업 비 : 4,800백만원(‘13년 사업비 : 500백만원)

◦ 사 업 기 간 : 2011년 ～ 2014년

■ 추진현황 및 추진계획

◦ ‘10년 11월 : 기본계획 완료

◦ ‘12년 11월 : 실시설계 완료

◦ ‘13년 3월 : 사업 계약 및 착공

◦ ‘14년 12월 : 사업 준공예정

■ 기 대 효 과

◦ 조희룡 선생에 대한 새로운 조명으로 다양한 문화 체험의장으로 활용하고, 주변      관광과 연계하는 광광 상품 제공

■ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)
	합계	2011년이전	2012년	2013년	2014년 이후
사업비	4,800		2,333	500	1,967

예술의 섬 조성

	목 적
한국을 대표하는 서양화가 김환기 화백의 고향인 안좌도를 문화예술의 고장 으로 조성하여 지역 이미지 제고 및 다양한 콘텐츠 개발을 통한 지역경제 활성화에 기여

■ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 신안군 안좌면 일원

◦ 사 업 비 : 9,200백만원 (광특 5,400 도비 200 군비 3,600)

◦ 사업기간 : 2011 ~ 2015(5개년)

◦ 사업내용 : 예술창작공방 리모델링, 지역문화 컨텐츠, 역사의 시간,

상징 조형물 등

■ 추진현황 및 추진계획

◦ 2011. 05 : 기본계획 용역 완료

◦ 2011. 10 ; 투융자심사 완료

◦ 2012. 12 : 실시설계 용역 완료

◦ 2013. 05 : 시설사업(건축 ∙ 토목 ∙ 조경)1차준 착공

◦ 2014. 05 : 테마공원 및 예술조형물 설치

◦ 2015. 05 : 고대화석 및 광물 등 전시시설 준공

■ 기 대 효 과

문화 예술을 대표하는 고장으로 위상 강화 및 새로운 명소로서 가치증진과

수용확대를 통한 관광자원으로 활용

■ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)
	합계	2011년이전	2012년	2013년	2014년 이후
사업비	9,200	300	2,150	883	5,867

신안 공설운동장 조성

	목 적
◦ 전문 체육인프라 시설을 집약적으로 구축하여 각종 체육대회 유치 등 지역 경제 활성화에 기여

■ 사 업 개 요

◦ 사  업  명  : 신안 공설운동장 조성사업

◦ 사  업  량 : 관람석5,000석, 인조구장, 트랙, 주차장(304대)

◦ 총 사 업 비 : 17,700백만원(국비 3,450, 군비14,250)

◦ 사 업 기 간 : 2008년 ～ 2015년

■ 추진현황 및 추진계획

ㅇ 투융자심사완료                  : ‘05. 12.

ㅇ 부지매입완료                    : ‘10.  5.

ㅇ 지방건설기술심의완료            : ‘11.  2.

ㅇ 문화재 지표조사완료             : ‘11.  3.

ㅇ 실시계획승인                    : ‘11.  5.

ㅇ 조달청 공사원가 사전심의 완료   : ‘11.  6.

ㅇ 현재 문화재시굴조사 실시        : ‘11.  8.

ㅇ 문화재시굴조사 ⇒ 발굴조사 전환 : ‘12.  3.

ㅇ 공사계약 및 착공(예정)           : ‘13.  6.

ㅇ 공사 준공(예정)                  : ‘15.  10.

■ 기 대 효 과

◦ 전문 체육인프라 시설을 집약적으로 구축하여 체육대회 유치

■ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)
	합계	2011년이전	2012년	2013년	2014년 이후
사업비	17,700	704	4,979	2,142	9,875

임자 전장지구 농어촌마을하수도정비사업

	목 적
❍ 임자면 전장지구에서 배출되는 생활오․폐수를 정화하여 수질오염방지 및 생활환경 개선을 도모

■ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 임자면 도찬리 일원

◦ 사 업 량 : 소규모공공하수처리시설 1개소(Q=100㎥/일),

오수관거 신설 L=4.96km, 오수중계펌프장 3개소

◦ 사 업 비 : 83.69억원 (국비:지방비=7:3)

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2016년

■ 추진현황 및 추진계획

◦ 실시설계 용역 착수	2013. 02
◦ 임자 전장지구 주민설명회	2013. 04
◦ 공법선정 공고	2013. 07
◦ 공법심의위원회 개최 및 공법선정	2013. 09
◦ 실시설계 완료	2013. 12
◦ 재원협의 신청(영산강 유역환경청)	2014. 01
◦ 재원협의의견 조치결과제출 및 협의완료	2014. 04
◦ 전라남도 설계자문 완료	2014. 05
◦ 도로점용 등 각종 인허가 완료	2014. 06
◦ 전라남도 계약심사 중	2014. 08
◦ 공사발주 예정	2014. 09

■ 기 대 효 과

◦ 보건위생 효과 : 하천의 오염으로 인한 수인성 전염병의 발병율 저감 효과

◦ 수도생산비 절감효과 : 하천의 수질을 향상시킴으로써 수도생산비용 절감 효과

비금·도초 면단위 하수처리장 설치사업

	목 적
❍ 비금면 도고2지구, 도초면 나포지구에서 배출되는 생활 오․폐수 정화 ❍ 수질오염방지 및 생활환경 개선을 도모

■ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 비금면 지당리, 도초면 외남리 일원

◦ 사 업 량 : 처리장 - 비금 150㎥/일, 도초 65㎥/일

오수관로 – 비금 13.87㎞, 도초 4.78㎞

◦ 사 업 비 : 164억원 (국비:지방비=7:3)

◦ 사업기간 : 2014년 ～ 2016년

■ 추진현황 및 추진계획

◦ 실시설계 용역 착수	2013. 02
◦ 비금 도고2지구, 도초 나포지구 주민설명회	2013. 03
◦ 기초자료 수집 및 분석	2013. 03
◦ 측량조사	2013. 04~05
◦ 관거노선 및 시설물 배치계획	2013. 05
◦ 배치계획 현장 검토	2013. 06
◦ 지반조사	2013. 07~08
◦ 공법선정 공고	2013. 07
◦ 공법선정 1차평가 완료	2013. 08
◦ 공법선정 완료(공법선정위원회)	2013. 09
◦ 실시설계 완료	2013. 11
◦ 설계 VE 완료	2014. 03
◦ 재원협의(영산강유역환경청) 완료	2014. 05
◦ 설계자문(전남도청) 완료	2014. 07
◦ 각종 협의 및 인허가 진행	2014. 07 이후

■ 기 대 효 과

◦ 신안군 비금면 도고2지구, 도초면 나포지구 일원에서 발생되는 오수를 수질기준에 적합하게 처리함으로써 입주민의 공중보건위생향상 및 생활환경개선을 도모하고 방류수역의 수질 및 생태계를 보존

■ 위치도 및 계획평면도

압해 하수종말처리시설공사

	목 적
◦ 압해읍에서 발생되는 생활하수를 정화하여 방류함으로 수질환경 보존 ◦ 수질환경 보존을 통한 주민의 보건위생 확보 및 정주여건 개선

■ 사 업 개 요

◦ 사 업 위 치 : 압해읍 일원

◦ 사  업  량

- 하수처리시설 : 처리용량 2,200㎥/일, 오수관로 13.7km

- 하수관거정비 : 오수관로 37.5km, 배수설비 40.5km(1,045가구)

◦ 총 사 업 비 : 431억원 (처리장 23,371 관거정비 19,839)

◦ 사 업 기 간 : 2005년 ~ 2015년

◦ 하수처리대상 : 1,045가구,  4,820명(보급율 31.8% ⇒ 42.4%)

■ 추진현황 및 추진계획

◦ 2012.01  : 하수처리시설공사 착공

◦ 2012.11  : 하수관거정비공사 착공

◦ 2014.09 ~ 2015.02  : 하수종말처리시설 시운전

◦ 2015.03  : 공공하수처리시설 사용개시

■ 기 대 효 과

◦ 생활하수의 체계적 관리로 방류수역 수질환경 개선

◦ 지역민의 주거환경 개선 및 정주여건 향상