109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 신안군에서 ‘16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
다기능 수산물 위판장 건립사업	5,000	-	-	4,250	2018	2016	0
신안 고둥(패류) 전시관 건립	3,500	-	-	3,500	2018	2016	20
증도 기독교체험관 건립사업	9,500	0	0	9,500	2019	2016	5
증도 한반도해송숲 관광자원화사업	9,700	0	0	9,700	2019	2016	5
장산도 역사문화 관광자원화사업	5,000	0	0	3,000	2019	2016	10
가고 싶은 섬 반월·박지도 가꾸기 사업	4,000	800	800	2,400	2019	2016	30

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2016년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

다기능 수산물 위판장 시설사업

담당자

해양수산과 박현욱(☎240-8910)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신안군의 관문인 송공항 일원에 다기능 수산물 위판장 건립을 통하여

청정해역 수산물의 우수성을 널리 알리는 동시에 원활한 유통망을

구축함으로써 어업인 소득증대 및 지역경제 발전에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2018년

○ 위 치 : 전라남도 신안군 압해읍 송공리 316-4

○ 규 모 : 다기능 수산물 위판장(연면적 4,362㎡, 1동 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,000			750	4,250
국 비	2,000			300	1,700
시 도 비
시군구비	1,500			225	1,275
지 방 채
민간자본	1,500			225	1,275
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 기본설계 추진 중

○

□ 향후계획

○ 2017. 10월 : 기본설계 및 심사완료

○ 2018. 01월 : 공사 착공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

신안 고둥(패류)전시관 건립사업

담당자

해양수산과 신상수(☎240-8403)

□ 사업목적 및 필요성

○ 광활한 바다에서 다양하게 자생하는 동식물에 대하여 어업에 의한

경제활동으로만 활용되고 있어, 새로운 부가가치 창출과 볼거리

제공을 위한 기반시설 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2018년

○ 위 치 : 전남 신안군 백산리 633-58 일원

(도서자생식물테마공원 연계 사업)

○ 규 모 : 전시관 1동(975㎡), 수장고, 체육교육실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,500			2,150	1,350
국 비	1,750			400	1,350
시 도 비
시군구비	1,750			1,750	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2015. 11월 : 제안서 접수(신안군 미래형 관광)

○ 2015. 12월 : 고둥 등 물품기탁 협약체결(3천여종, 10만여점)

○ 2016. 08월 : 기본계획용역, 투융자심사 완료

○ 2016. 11월 : 건축 실시설계 용역 착수

○ 2017. 04월 : 전남도 디자인 공동심의(재심의)

○ 2017.05.24. : 道 경관/ 공공디자인 재심의

○ 2017. 07월 : 신축 실시설계 완료

□ 향후계획

○ 2017. 08월~ : 건축공사 사업착공

○ 2017. 12월  : 전시설계 완료

○ 2018. 07월  : 건축공사 사업준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

증도 기독교체험관 건립사업

담당자

문화관광과 김형하(☎240-8974)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기독교 여성 최초 순교자인 문준경 전도사의 화해와 평화의 정신을 국내외에 알리는 계기를 마련하고, 역사적‧문화적 가치가 있는 종교문화시설 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위 치 : 전남 신안군 증도면 대초리 220-2 일원

○ 규 모 : 지상2층(연면적 2,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,500	-	-	3,000	6,500
국 비	2,850	-	-	900	1,950
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,650	-	-	2.100	4,550
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2016.  5. : 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 완료

○ 2016. 11. : 공공건축 사업계획 사전검토 결과 통보

□ 향후계획

○ 2017. 10. : 설계공모 실시

○ 2017. 12. : 군관리계획변경(농림지역, 보존산지 해제)

○ 2018. 01. : 건축물 실시설계 용역 추진

사업명

증도 한반도해송숲 관광자원화사업

담당자

문화관광과 김형하(☎240-8974)

□ 사업목적 및 필요성

○ 증도의 다양한 문화관광자원과 생태자원을 연계하여 가족단위 관광객들을 위한 관광시설 정비 및 관광콘텐츠 확충을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위 치 : 전남 신안군 증도면 대초리 일원

○ 규 모 : 워터파크 조성, 다목적 야외공연장, 생태탐방로 정비,

주차장 조성, 자전거 기반시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,700	-	-	833	8,867
국 비	5,820	-	-	500	5,320
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,880	-	-	333	3,547
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2016.  5. : 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 완료

○ 2017.  4. : 한반도 해송숲 관광자원화사업 사전기획평가

○ 2017.  7. : 한반도 해송숲 관광자원화사업 기본계획 보완 용역 시행

□ 향후계획

○ 2017.  9. : 사업별 실시설계

○ 2017. 12. : 군관리계획변경(농림지역, 보존산지 해제)

○ 2018. 01. : 사업별 착공

사업명

장산도 역사문화관광자원화

담당자

문화관광과 이재근(☎240-8353)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장산도의 풍부한 역사문화자원을 활용한 새로운 관광명소 조성을 통해 지역활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위 치 : 전남 신안군 장산면 대리 일원

○ 내 용 : 역사문화체험단지 조성, 역사문화탐방로(27.5km),

장산도 전통문화체험관 건립(990㎡) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,000				5,000
국 비	3,000				3,000
시 도 비
시군구비	2,000				2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 2017년 7월 사업계획 변경 승인

□ 향후계획

○ 2017년 9월 실시설계 발주

○ 2017년 11월 사업 착공

사업명

가고싶은섬 반월·박지도 가꾸기 사업

담당자

도서개발과 김현아(☎240-8758)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬 지역의 자연 환경을 보존하고 관광기능을 도입하여 지역사회 발전과       관광 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2019년

○ 위 치 : 신안군 안좌면 반월·박지도 일원

○ 내 용 : 경관 및 건축물관리, 편의시설, 해안 및 마을정비, 산책로 등산로개설,              홍보 및 마케팅, 주민역량강화교육, 마을기업육성, 관광서비스개선 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,000	800	800	800	1,600
국 비
시 도 비	2,000	400	400	400	800
시군구비	2,000	400	400	400	800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

○ 2015. 09. 기본계획수립 용역 완료

○ 2016. 09. 반월도 마을식당(리모델링)공사 완료

○ 2016. 11. 박지도 해안가 둘레길 정비공사 완료

□ 향후계획

○ 2017. 07. 반월도 등산로 정비공사 실시

○ 2017. 09. 반월 마을카페 신축공사 실시

○ 2017. 09. 박지도 게스트하우스 및 마을식당 공사 실시

10-2. 지방채 발행사업

우리 신안군에서 ‘16년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2016년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 (해당없음)

10-3. 민간투자사업

우리 신안군에서 ‘16년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’15년까지 부담액	’16년 부담액	’17년 이후 부담 예정액
BTL		해	당	없	음
BTO

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2016년까지는 집행액(결산기준), 2017년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황 (해당없음)