정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	해양수산과	②담당자 (전화번호)	이은상(240-8419)
③정책사업명	압해 송공지구 공유수면 매립
④선정기준	대규모 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2010.04.16~ 2018.12.31
⑥주요내용	◦추진목적 : 본 사업지구는 2018년 새천년대교 개통과 연계 하여 기존 목포항으로 통하던 모든 물적·인적 연안교통체계를 송공항으로 집중시켜 물류비용절감의 극대화와 체계적인 어업 활동을 통해 낙후된 지역경제 활성화 도모하기 위해 도서기반 시설을 확충하는데 목적이 있음 ◦추진계획 위 치 : 신안군 압해읍 송공리 규 모 : 공유수면 매립 A=240,049㎡ (외곽시설, 계류시설, 도로, 주차장, 수산물처리시설 등) 총사업비 : 22,557백만원(군비 11,768) ･공 사 비 : 19,790백만원(군비 9,000/ 대물 10,790) ･감 리 비 : 857백만원 ･지구계획 : 300백만원 ･기 타 : 1,610백만원 공사기간 : 2010. 04. 16~2018. 12. 31. 시공회사 : 위본건설(주) 대표 송병묵 ◦추진상황 ‘13.07.16 : 총괄 및 1차분 계약 및 착공 ･ 총괄도급액 15,546,998천원(1차분 2,852,251천원) ‘14.01.29 : 2차분 계약 및 착공 ･ 총괄도급액 15,546,998천원(2차분 5,386,876천원) ‘15.08.24 : 총괄 및 1차분 변경계약 및 착공 ･ 총괄도급액 15,946,645천원(1차분 2,852,251천원) ‘15.08.26 : 1차분 준공(2,852,251천원) ‘15.09.02 : 2차분 변경계약 및 착공(기간연장) ‘15.12.14 : 2차분 기성검사(259,460천원) ‘16.04.30 : 공유수면실시계획변경인가신청 ‘16.05.30 : 공유수면매립 타절준공 ‘16.07.30 : 공유수면매립 2단계 계약추진