정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	흑산공항중심권개발단	②담당자 (전화번호)		과장 행정5급 양국진 담당 행정6급 최한웅 (061-240-8765)
③정책사업명	흑산 공항 건설
④선정기준	주요 국정 현안에 관한 사항		⑤사업기간		2014년~2020년
⑥주요내용	□ 사업개요 ○ 위 치 : 흑산면 예리 일원 ○ 사업규모 : 50인승 항공기 취항 공항 ○ 주요시설 : 활주로(L=1,200m, B=30m), 항행안전시설 등 ○ 사 업 비 : 1,833억원(국비) ＊국가시행사업(서울지방항공청) □ 필요성 및 기대효과 ○ 해양관광 관문 역할 수행으로 국내․외 관광객 유치 극대화 ○ 국토방위의 전략적 요충지 활용 및 오지낙도 비상교통수단 제공 ○ 흑산도지역 주민과 관광객의 교통 불편 해소 □ 지금까지 추진현황 ○ 예비타당성조사, 국가사업 결정(기재부) : 2013.05 ○ 흑산도 공항 기본계획용역 시행(국토부) : 2014.03 ~ 2016.06 ○ 전략환경영향평가 협의(조건부 협의) : 2015.10 ○ 흑산공항 기본계획 고시 : 2015.12.18. ○ 흑산공항 공유수면 매립기본계획 반영(해수부) : 2016.03.30 ○ 흑산공항 건설사업 환경영향평가 협의회 개최 : 2016.03.31 ○ 토지 등의 보상추진을 위한 관계기관 협의(서울지방항공청) : 2016.04.19. ○ 턴키공사 입찰공고(3차례) → 유찰(1개 업체 단독 응찰) :‘16.10.17. ~ ’17.01.18. * 단독응찰 공동수급체 : 금호건설, 롯데건설, 포스코엔지니어링 컨소시엄 ○ 수의계약 추진요청(서울지방항공청 → 조달청) : ’17.02.08. ○ 수의계약 집행 세부지침 확정(조달청) : ’17.03.23. ○ 단독입찰자의 계약의사 확인 및 PQ심사(조달청), 현장설명회(서항청) : 2017.04 □ 앞으로의 추진계획 ❍ 기본설계 및 설계심의(국토부 중앙심의위원회) : 5월 ~ 8월 ❍ 실시설계 및 설계심의(서항청), 계약(조달청) 및 착수 : 8월 ~ 12월