정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	해양수산과	②담당자 (전화번호)		과장 수산5급 문성칠 담당 시설6급 조영일 (061-240-8417)
③정책사업명	압해 송공지구 공유수면매립(2공구) 및 관문광장 조성
④선정기준	중점관리가 필요한 사업 (군정 역점 시책)		⑤사업기간		2013~2018
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 본 사업지구는 2018년 새천년대교 개통과 연계하여 기존 목포항으로 통하던 모든 물적·인적 연안교통체계를 송공항으로 집중시켜 물류비용절감의 극대화와 체계적인 어업 활동을 통해 낙후된 지역경제 활성화 도모하기 위해 도서기반 시설을 확충하고자 함 □ 추진계획 ○ 위 치 : 신안군 압해읍 송공리 ○ 규 모 : 공유수면 매립 A=208,275㎡ 1공구 : 36,101㎡, 2공구 : 58,910㎡, 3공구 : 113,264㎡ (외곽시설, 계류시설, 도로, 주차장, 수산물처리시설 등) 공 사 비 : 5,801,803천원(도급 5,464,063, 관급 337,740) 사업기간 : 2017.03.14. ~ 2019.03.09. - 시 공 사 : 대륙건설(주) 대표 조성래 □ 지금까지 추진상황 ○ ‘13.07.16 : 총괄 및 1차분 계약 및 착공 ○ ‘14.01.29 : 2차분 계약 및 착공 ○ ‘15.08.24 : 총괄 및 1차분 변경계약 및 착공 ○ ‘15.08.26 : 1차분 준공 ○ ‘15.09.02 : 2차분 변경계약 및 착공(기간연장) ○ ‘15.12.14 : 2차분 기성검사 ○ ‘16.04.30 : 공유수면실시계획변경인가신청 ○ ‘16.05.30 : 공유수면매립 타절준공 ○ ‘16.12.13. : 송공지구 공유수면 매립(2공구)추진계획 보고 ○ ‘16.12.16. : 송공지구 공유수면 매립(2공구) 발주 ○ ‘17.03.14. : 송공지구 공유수면 매립(2공구) 1차분계약 및 착공 ○ ‘17.03.30. : 송공지구 공유수면 매립(2공구) 2차분계약 및 착공 □ 앞으로 추진계획 ○ 2017.05월 : 블록제작 완료 ○ 2017.06월 : 준설선 투입 및 박지준설(V=87,562㎥) ○ 2017.07월 :송공지구 공유수면매립(2공구) 1차분 준공예정