정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	섬마을인생학교(섬마을 인생학교 리모델링 사업)
② 추진배경	1004섬 신안으로 행복찾아 유학오는 덴마크형 섬마을 인생 학교를 보다 효과적으로 운영 및 활용하고자 함
③ 사업개요	○ 사업위치 : 신안군 도초면 도초서길 246-11(도초서초) ○ 사업규모 : 리모델링 1식, 약 522㎡(157평) ○ 사업내용 : 교실 및 강당, 식당 등 ○ 사 업 비 : 1,140백만원
④ 사업부서	교육복지과		⑤ 담당자	사회복지7급 최 미 행정5급 고민호
⑥ 선정기준	기타		⑦ 사업기간	‘19.1. ~‘20.6.
<그간 주요 추진내용>
○ 덴마크형 섬마을 인생학교 설립에 따른 건물 리모델링 추진계획 (교육복지과-1889)		‘19.01.14.	박우량 군수 박경곤 부군수 김지곤 국장 박운기 과장 박성진 담당 한민희 주무관
○ 도초서초등학교 별관동 구조 안전 진단 및 석면조사용역 추진계획 (교육복지과-31072)		‘19.06.13.	김지곤 국장 박운기 과장 박성진 담당 한민희 주무관
○ 도초서초등학교 폐교 리모델링 실시 설계용역 계약 의뢰 (교육복지과-32144)		‘19.06.19.	박운기 과장 박성진 담당 한민희 주무관
○ 도초서초등학교 폐교 리모델링 실시 설계 용역완료(교육복지과-49390)		‘19.11.01.	박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 도초서초등학교 별관동 리모델링 공사 추진 계획(교육복지과-49390)		‘19.11.19.	박우량 군수 박경곤 부군수 고승재 국장 박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 도초서초등학교 별관동 리모델링 건축공사 계약의뢰(총괄발주) (교육복지과-54368)		‘19.12.05.	박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 도초서초등학교 별관동 리모델링 공사추진계획 (교육복지과-19165)		‘20.05.12.	박우량 군수 박종열 부군수 장형철 국장 문영윤 과장 송현중 담당 박재필 주무관

○ 도초서초등학교 별관동 리모델링 전기공사 설계변경 추진계획 (교육복지과-19293)	‘20.05.12.	장형철 국장 문영윤 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 도초서초등학교 별관동 리모델링공사 (건축-총괄 1차, 2차, 전기, 관급자재) 변경계약 의뢰	‘20.05.14. ~ 05.18.	문영윤 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 도초서초등학교 별관동 리모델링공사 준공검사 및 자산등록 (전기, 공사 1, 2차, 주변정비)	‘20.06.26. ~ 06.11.	문영윤 과장 송현중 담당 박재필 주무관